투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「서울숲 무장애 친화공원 조성공사」설계변경 시행 및 계약변경 의뢰

1. 시설과-3086(2019.12.9.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『서울숲 무장애 친화공원 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울숲 무장애 친화공원 조성공사

나. 도 급 액 : 금731,450,000원

다. 공사기간 : 2018. 12. 17 ~ 2020. 04. 15

라. 도 급 자 : ************

마. 도급비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	664,954,545	716,699,091	51,744,546
	부가세	66,495,455	71,669,909	5,174,454
	도급비계	731,450,000	788,369,000	56,919,000

바. 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 시민참여 프로그램운영, 무장애 친화공원 조성, 시설비및부대비, 시설비(401-01)

사. 공사기간연장 : 해당없음

붙  임 : 1. 설계 변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김재희		공원조성팀장	하종식		시설과장	12/10 진병규
협조자	재무팀장	곽선아
시행	시설과-3105	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1156	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	부분공개(5)