투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(2019년 제1처리장 소화조 보수공사-난지)

1. 시설보수과 방침서-3353(2019.12.09.)호와 관련입니다.

2. 우리센터에서 시행하고 있는 “2019년 제1처리장 소화조 보수공사-난지”에 대하여

아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 제1처리장 소화조 보수공사-난지

나. 공사기간 : 2019.07.22.~ 2019.12.31

다. 도 급 자 : 레오개발주식회사 대표 양공진

라. 연기사유 : 하반기 공사계약(시 방침서준수 이행) 및 송풍기동 보수에 따른

정전계획 실시 등 인해 절대공기 부족

마. 준공기한 연기요청 현황

- 당초 : 2019.07.22. ~ 2019.12.31

- 변경 : 2019.07.22. ~ 2020.03.31

붙임 : 방침서 및 관련자료 1부. 끝

	시설보수과장
주무관	최기문		시설팀장	이호복		시설보수과장	12/10 조선행
협조자
시행	시설보수과-3357	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 본관 2층 시설보수과	/
전화	02 300 8590	/전송	02 300 8587	/	cgm84@seoul.go.kr	/	대시민공개