＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2019년 공릉배수지외 2개소 정밀안전진단용역)

우리 사업소에서 시행중인 “2019년 공릉배수지외 2개소 정밀안전진단용역”에 대하여     아래와 같이 설게변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2019년 공릉배수지외 2개소 정밀안전진단용역

나. 계 약 자  : *********   ******

**********   ******

다. 계약기간 : 2019.04.17 ~ 2019.12.17

라. 계약금액

구 분	당 초	변 경	증 액	비 고
도급액	************	************	***********

마. 설계변경 사유 : 추가 과업지시에 따름 물량증가

바. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

첨부 : 1. 설계변경시행 품의서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계병경 심의결과 보고서 1부.

4. 합의서 1부.   끝.

	급수운영과장
급수관리팀장	최용진		주무관	황은주		급수운영과장	12/10 유승효
협조자	주무관	윤승구		주무관	구명임
시행	급수운영과-25383	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3370	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(7)