문서번호	설비부-20262
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장		시설국장
박경철	여인웅	임정규		전결 12/11 김승원
협 조
	방재시설부장		이임섭
	물재생기획팀장		오승민
	환경시설과장		오열상
	주무관		곽용길

「난지총인(3차) 처리시설 설치사업」추진관련

'19년 명시이월예산 조치계획 보고

2019. 12.

도시기반시설본부

설비부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「난지총인(3차) 처리시설 설치사업」추진관련

'19년 명시이월예산 조치계획 보고

난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 추진관련, GB관리계획 변경 등의 행정절차 미이행(경기도와 협의 진행 중)에 따른 원활한 사업추진을 위해 ‘19년 명시이월예산(국비) 불용방지를 위한 조치계획 검토보고임		ㅣ

1		관련 근거

❍ 위법사항 해소 및 ‘19년 예산 조치계획 보고:물재생시설과-16058(‘19.12.05.)

- 집행잔액 중 명시이월된 국비(180억원) 대하여 사고이월 조치 요청

2		사업 개요

❍ 사업규모 : 총인처리용량 439,000㎥/일(T-P 0.12mg/L이하)

▷ 총인처리시설 439,000㎥/일(T-P 0.12mg/L이하) ▷ 비총인계열 250,800㎥/일(T-P 1.15mg/L이하)	⇒	혼합방류 T-P 0.5mg/L이하

❍ 적용공법 : 약품응집 섬유디스크필터(YDF)

❍ 공사기간 : 2017.06. ~ 2020.12.

❍ 총사업비 : 54,003백만 원(‘19년 36,000백만 원)

❍ 감 리 사 : ㈜삼안 외 3개사

❍ 시 공 사 : 대성기공, 남양계전, 상아전력, 에이스건설

❍ 설 계 사 : 동해종합기술공사 외 4개사

❍ 2019년 예산집행 현황(※집행액은 물재생시설과에서 집행함)

구 분		예산현액	집 행 액	집행잔액	비 고
합 계		**********	******	**********
시 설 비	소 계	**********		**********
	국 비	**********		**********
	시 비	**********	******	**********	▹GB관리계획 용역비 집행
감 리 비		*********		*********
시설부대비		******		******

❍ 계약현황                                               (단위:천원)

건 명		계약자	총 차 계약금액	1 차 계약금액	‘20년 예산 집행 예정액 (사고이월)	비 고
			총 차 계약기간	1 차 계약기간
기 계	도 급	****	**********	*******	*******
			*******************	*******************
	공법기자재	******	**********	******	*********	****** ***********
			*******************	*******************
	정량펌프	****	*******	*******	*******
			*******************	*******************
전 기		*****	*********	*******	*******
			*******************	*******************
통 신		*****	******	******	******
			******************	*******************
토목(건축,조경포함)		*****	*********	*********	*********	****** ***********
			*******************	*******************
폐기물처리용역		******	*******	******	******
			*******************	*******************
합 계			**********	*********	**********	시설비
건설사업관리용역		***	*********	*******	*******	감리비
			*******************	*******************

3		보고 내용

❍ 계약기간 연장사유 및 기간

- 연장 사유 : 명시이월예산 불용방지를 위한 차수계약 시행 등

- 연장기간 : 2022.2.28.까지(총차)

- 연장내용

건 명		계약자	계약기간			비 고
			총차	변경전	변경후
			1차
기 계	도 급	****	*******************		*******************	시설비
			*******************		*******************
	공법기자재	******	*******************		*******************	〃
			*******************		*******************
	정량펌프	****	*******************		*******************	〃
			*******************		*******************

건 명	계약자	계약기간			비 고
		총차	변경전	변경후
		1차
전 기	*****	*******************		*******************	시설비
		*******************		*******************
통 신	*****	*******************		*******************	〃
		*******************		*******************
토목(건축,조경포함)	*****	*******************		*******************	〃
		*******************		*******************
폐기물처리용역	******	*******************		*******************	〃
		*******************		*******************
건설사업관리용역	***	*******************		*******************	감리비
		*******************		*******************

- 계약기간 연장 귀책사유 : 서울시

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

※ 1차수 계약금액에 대하여 원인행위 조치 필요

❍ 2차수 계약 시행

- 계약건명 : 난지재생물센터 3차(총인)처리시설 총인처리공법기자재 구매(2차)

•계약상대자 : *******

•계 약 기 간 : 계약일로부터 2020.12.20.

•계 약 금 액 : ***********

- 계약건명 : 난지재생물센터 3차(총인)처리시설 설치사업(2차)

•계약상대자 : ******

•계 약 기 간 : 계약일로부터 2020.12.20.

•계 약 금 액 :************

4		보고자 의견

❍ 본 사업의 원활한 공정관리 및 명시이월예산 불용방지를 위하여       기계약된 공사에 대하여 공사기간 연장조치 및 2차수 계약을 시행       하여 사업추진에 만전을 기하고자함

5		행정 사항

❍ 계약연장 및 2차수 계약 후 GB관리계획 변경 승인시까지 공사 중지 통보