문서번호	방재시설부-18604
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김달용		신용우	12/11 이임섭
협 조
	주무관			강대호

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사』

공사구간내 지장수목 이식 및 반출제거 실정보고 검토보고

2019. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사』

공사구간내 지장수목 이식 및 반출제거 실정보고 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『제2자유로 종점부(난지도길)입체화공사』책임건설사업관리기술자로

부터 공사구간내 지장되는 지장수목 처리에 대한 실정보고 사항 검토

보고임.  [관련공문 : 제2자유입건 제2019-113호(‘19.12.06)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵로 (월드컵경기장 사거리 일대)

○ 규    모 : 지하차도 신설 (폭4차로, 연장 540m)

도로확폭 (양방 각1차로, 총연장 582m)

□조경공사 : 교목이식 389주, 관목제거 12,059주, 조경복구 1식

○ 기    간 : 2019. 8. 1 ~ 2021. 7. 31

○ 사 업 비 : 351억원

Ⅱ		실정보고

○ 지장수목 변경처리 승인 요청

□현장여건 상이 및 협의결과 반영

▪교목이식 : 389주 → 53주 (관계기관 협의 및 수요처 의견반영)

□문화비축기지 보도 대형 느티나무 17주 현장존치 (마포구 가로수 보존요청)

▪반출제거 수목 전처리 임시작업장 2개월 확보 (고양시 현천동)

▪임목폐기물 처리비 및 스마트송장 비용 반영

□추진경위

▪2019.09.23 : 지장수목 사용처 조회 (토목부 → 사업소,자치구)

▪2019.10.15 : 지장수목 사용 요청 (종로구 : 느티나무 R40 4주)

▪2019.10.17 : 관리기관 협의 (방재시설부 → 서부공원녹지사업소, 마포구)

▪2019.10.31 : 지장수목 협의결과 통보 (방재시설부 → 감리단)

▪2019.12.06 : 지장수목 처리 실정보고 (감리단 → 방재시설부)

Ⅲ		검토내용

○ 지장수목 조치계획

□공사구역내 저촉수목에 대하여 서부공원녹지사업소 및 마포구 협의

- 현장수목 중 노거목이거나 수형 불량목, 이식가치가 없는 수목은 반출제거

- 이식대상 수목은 지정장소로 이식하고 대형가로수는 현장보존

(향후 문화비축기지 보도 설치시 선형조정 필요 : 느티나무 17주 존치)

□협의사항 : 교목 [반출제거 461, 이식 53], 관목 [제거 9,769, 이식 5,300]

○ 소요예산                                         (단위 : 천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증 감
		수량	금 액	수량	금 액
계			244,932		260,516	증)15,584
수목처리 (교목,관목)	주	15,542	152,688	15,583	144,619	감)8,069
임목폐기물	ton	4	19	202	12,116	증)12,097
부지임대료	식	-	-	1	8,000	증)8,000
스마트송장	식	-	-	1	55	증)55
제 경 비	식	1	92,225	1	95,726	증)3,501

※『공사계약 일반조건 제20조 2항(현장상태와 설계서 상이)』에 의한 변경으로

□시공자의 책임없는 사유에 해당□하므로 향후 설계변경시 신규단가는 강제협의율

(89.077%)로 적용함이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		보고자 의견

○ 난지도길 입체화 공사구역에 저촉되는 이식(제거)물량 변경사항으로, 조경

공사 설계변경에 대한 책임건설사업관리기술자의 의견이 타당하다고 판단

되어, 추후 설계변경시 반영토록 지시하고

○ 녹지대 복구계획은 2020.10월에 관리기관(서부공원녹지사업소,마포구)와

재협의하여 추진하고자 함

붙임 : 1. 지장수목현황 및 현장사진 1부.

2. 책임건설사업관리기술자 검토의견 1부.  끝.

지장수목 현황 및 현장사진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

하늘공원

공사구역내 지장수목 현황

월드컵경기장

문화비축기지

월드컵경기장사거리

평화의공원

증산로 시점부 전경 (문화비축기지, 월드컵공원, 월드컵경기장 가로수 저촉)

경기장사거리