문서번호	생태환경과-3357
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김화시		최병언	12/11 김인숙
협 조

『2019년 반포 그늘숲 조성사업』설계변경 시행

2019. 12.

한강사업본부

생태환경과

『2019년 반포 그늘숲 조성사업』설계변경 시행

울창한 한강변 숲 조성을 위해 시행중인「2019년 반포 그늘숲 조성사업」에 대하여 현장여건에 따른 변경사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 함.

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 2019년 반포 그늘숲 조성사업

○ 위    치 : 반포한강공원(잠수교 주변)

○ 공사기간 : 2019. 9. 17 ~ 12. 15

○ 공사내용

- 수목식재 : 대왕참나무 등 11종 17,174주

- 초화식재 : 가우라 등 2종 26,500본, 잔디 668㎡

○ 도 급 비 : 금492,590,900원

○ 도 급 자 : 상림조경 대표 서명현

▢ 주요변경 내용

○ 수형 불량목 제거 및 그늘목 식재로 경관향상

○ 잔디 훼손구간 잔디 식재 추가 및 보호매트 설치

○ 경관향상을 위한 수목 추가 식재

○ 안전한 공사현장 관리를 위하여 가름막 휀스 및 보행도우미 반영

○ 유기질 비료 물량 과다 설계로 인한 물량 조정

○ 수목크기에 맞는 지주목 크기 및 물량 증감

▢ 설계변경 내용

구 분	변경사유 및 변경요청	비 고
식재 공사	○ 불량수목 및 고사목 제거 후 대체식재 및 식재수량 조정
	▸교목제거(B15) : 6주 → 19주 ▸교목제거(B12) : 14주 → 15주 ▸교목제거(B20) : 0 → 1주 ▸교목제거(B18) : 0 → 1주 ▸교목제거(B10) : 0 → 12주 ▸거향수(R10): 20주 → 40주 ▸참느릅나무(R12): 124 → 109주 ▸대왕참나무(R25): 30주 → 38주 ▸팽나무(R25): 20주 → 30주 ▸이팝나무(R15): 58주 → 108주 ▸이팝나무(R20): 0 → 8주 ▸화살나무(H0.6xW0.3) : 0 → 2,700주 ▸덜꿩나무(H1.0xW0.4) : 0 → 1,800주
	○ 현장내 답압으로 인한 잔디훼손구간 잔디식재 추가 및 초화류 식재수종 및 규격 변경
	▸잔디(평떼) : 668㎡ → 2,769㎡ ▸가우라(15cm) : 14,500본 → 0 ▸코레우리(15cm) : 12,000본 → 0 ▸가우라(8cm) : 0 → 13,592본 ▸아스타(8cm) : 0 → 14,563본
	○ 반입토사에 대한 운반비 제외
	▸토사반입: 804㎥ → 0
식재 및 시설물 공사	○ 교목 식재수량 증가에 따른 지주목 수량 변경 필요
	▸삼발이지주목(대형): 30조 → 78조 ▸삼발이지주목(중형): 0 → 29조
	○ 반포한강공원 이용객의 안전을 위한 가림막휀스 설치 및 보행 안전 도우미 배치 필요
	▸가설울타리(H1,200xW2,000) : 0 → 100경간 ▸보행자도우미 : 0 → 48인
관급자재	○ 상기 현장 실정사항으로 인한 관급자재 물량 변경사유 발생
	▸가우라(15cm) : 14,500본 → 0 ▸코레우리(15cm) : 12,000본 → 0 ▸가우라(8cm) : 0 → 14,000본 ▸아스타(8cm) : 0 → 15,000본 ▸비료(20kg) : 5,671포 → 1,281포 (비료 물량 과다 설계로 인한 정산) ▸통기관 : 558EA → 708EA ▸잔디보호매트 : 0 → 410㎡ ▸옥외용벤치 : 0 → 4EA

▢ 설계변경 금액

○ ┏ 당   초 : *************

┗ 변   경 : *****************************

(단위: 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		***********	***********	************
도급액	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************
관 급 액		***********	***********	***********

▢ 예산활용 계획

○ 본공사 낙찰차액 및  한강숲 총 예산잔액 등******** 활용

(단위 : 백만원)

***** ***	**** ***	**** ***	**** *****	**** *****	**** ****
***	***	***	**	**	**

○ 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 한강숲 조성, 시설비(100-401-01)

▢ 조치계획

○ 위와 같이 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 설계변경도서 1부.  끝.