문서번호	생산관리과-12551
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
라승보		代유양현	12/11 代조성태
협 조

『정수센터 시설물 도면 전산화(CAD) 추진』

2019 세출예산 이월계획 보고

2019. 12.

생   산   부

(생산관리과)

『정수센터 시설물 도면 전산화(CAD) 추진』

2019 세출예산 이월계획 보고

정수센터 시설물 도면 전산화(CAD) 추진 사업의 일환으로 시행중인 『정수센터 지하매설물 및 도면철 DB구축 용역』의 사업비 이월 계획   보고임.

사업개요

○ 사 업 명 : 정수센터 시설물 도면 전산화(CAD) 추진

○ 용역(사업) 개요

- 용 역 명 : 정수센터 지하매설물 및 도면철 DB 구축 용역

- 용역규모 : 설계(종이)도면 DB 구축  25,745면

지하매설물 GIS DB 구축  60㎞

- 공 사 비 : 128,469천원

- 공사기간 : 2019. 10 . 21. ~ 2020. 2. 19.

- 시 공 사 : 아이씨티웨이 주식회사 대표 조유복

이월액 현황                                           (단위:원)

예 산 액	지출원인행위액	지 출 액	이 월 액	불 용 액
140,000,000	128,469,000	51,387,600	77,081,400	11,531,000

- 예산과목 : 정수장시설유지보수,수선유지교체비,수선유지비(정수센터 시설물 도면 전산화(CAD) 추진)

이월액 발생 사유

○ 본 사업은 정수센터 시설물의 전산화를 통한 체계적 관리를 목적으로 추진하는 사업으로, 금년도 3월부터 6월 말까지 정수센터별 사업물량을 파악한 후 용역 발주에 착수함.

○ 용역설계 및 발주전 행정행위(예산타당성 심사, 제안요청서 심사, 계약심사, 입찰규격 공개 등) 완료 후 협상에 의한 계약 방식으로 입찰을 진행하였으나, 1․2차 입찰 모두 단독응찰로 유찰되어 용역착수가 늦어짐.

○ 본 용역 수행의 절대공기 4개월을 확보하기 위해서는 명년 2월 19일 까지 용역을 진행하여야 하며 이로 인해 부득이 사고이월이 발생함.

- 사업추진 개요

․ 정수센터별 사업물량 조사               : ’19. 3. 18 ~  6. 30.

․ 용역 설계 및 사전 행정행위             : ’19. 7. 1. ~ 8. 17.

․ 용역 입찰공고(협상에 의한계약)         : ’19. 8.29. ~ 9. 27.

․ 용역 재공고 (협상에 의한 계약)         : ’19.. 9.16. ~ 9. 27.

․ 용역 (수의)계약체결                    : 2019. 10. 15.

행정사항

○ 이월 대상액 77,081,400원을 2020년 세출예산으로 이월 조치

붙임 : 1. 용역계약서 사본 1부

2. 이월사업별 명세서 1부. 끝.