문서번호	보행정책과-6940
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
교통전문관	도로공간재편팀장	보행정책과장
고영하	박창수	12/11 박태주

2019 생활권 도로다이어트 사업대상지(서초) 변경 추진 계획

2019. 12.

도시교통실

(보행정책과)

2019년 생활권 도로다이어트

사업대상지(서초) 변경 추진계획

’19년 생활권 도로다이어트 대상지 중 서초 바우뫼로7길이 주민 반대에 따른 공사 중지로 신규대상지를 선정하고 변경 추진하고자 함

□ 그 간 추진경위

○ ’19년 생활권 도로다이어트 추진계획 수립	: ’18. 11. 14.

○ 사업대상지 공모	: ’18. 11. 19. ~ ’18. 12. 21.

○ 사업대상지 우선순위 선정 자문위원회 개최	: ’19. 1. 4.

○ 사업대상지 선정(서초 바우뫼로7길 포함)	: ’19. 1. 8.

○ 우암초교 면담 및 주민의견 수렴	: ’19. 3. ~ ’19. 5.

○ 바우뫼로7길 설계 시행	: ’19. 3. ~ ’19. 6.

○ 교통안전시설 심의 통과	: ’19. 4. 18.

○ 사업예산 교부	: ’19. 6. 10.

○ 바우뫼로7길 공사 발주	: ’19. 6.

○ 바우뫼로7길 공사 계약	: ’19. 7.

□ 변경사유

○ 공사 착공 시, 해당 사업지의 차도 축소를 반대하는 집단민원 발생

- 사업지 인근 대림아파트 입주자대표회의의 반대 연명서 제출

- 사업지와 접한 우암초등학교의 보도확장 의견 반대

-  사업지 도로를 주로 이용하는 인근 종교 시설의 대형차량 이용불편에 따른 차도축소 반대로 사업 추진 어려움

	< 당초 사업 개요 >
․사업위치 : 서초구 우면동 58 ~ 우면동 64-2 ․사업구간 : 대림아파트 ~ 바우뫼로, L= 250m ․개선내용 : 보도확장(2.6m→5.0m), 차도축소(9.6m→7.2m), 교통정온화, 안전펜스, 어린이 보호구역 CCTV 설치 우암초등학교 ·보도폭: 2.6m → 2.6m ·차도폭: 4.8m → 3.6m · 보도폭: 2.6m → 5.0m · 차도폭: 4.8m → 3.6m · 보도폭: 2.8m → 3.8m · 차도폭 5.4~8.1m → 4.4~7.1m · 보도폭: 2.8m → 3.8m · 차도폭 5.3~7.9m → 4.3~6.9m

□ 변경 사업내용

○ 사업위치 : 양재천로(바우뫼공원~양재리본타워아파트, L=240m)

○ 사업개요 : 보도확장(2.4m→5.0m), 양재천측 보도는 산책로와 통합

○ 주요내용 : 도로구조개선 및 보행환경개선을 위한 도로다이어트

- 보도확장, 차도축소, 보행안전시설 설치, 고원식 횡단보도 설치

○ 행정사항 : 전문가 자문, 주민의견 수렴 및 교통안전시설 심의 통과

□ 향후 일정

○ ’20. 3. : 공사 시행

○ ’20. 5. : 공사 완료

붙임 1. 신규사업지 개요

2. 교통안전시설 심의 통보

3. 민원 공문