투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 보고(하늘공원 탐방객 안내소 주변 정비공사)

1. 시설과-2934(2019. 12. 10.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건명: 하늘공원 탐방객 안내소 주변 정비공사

나. 계약자: 고성조경(주) 대표 최정인

다. 계약금액: 금33,300,000원(금삼천삼백삼십만원)

※ 원인행위No: 1447

라. 계약기간: 2019. 11. 22.~ 2019. 12. 16.

마. 변경내용: 계약금액 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	30,272,728	45,318,182	15,045,454
	부가세	3,027,272	4,531,818	1,504,546
	도급공사비	33,300,000	49,850,000	16,550,000

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

★주무관	김호영		재무팀장	정동철		공원운영과장	배효성		서부공원녹지사업소장	12/11 代배효성
협조자
시행	공원운영과-17256	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)