투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(전체 11회, 6차 3회) 및 준공기한 연장 계약 의뢰(신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사 전면책임감리용역)

우리본부에서 시행중인「신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사 전면책임감리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(전체11회,6차3회) 및 준공기한 연장 계약 의뢰하오니 조치  하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임감리용역

나. 계 약 자 : 수성엔지니어링 외 4개사

다. 계약금액 내역

(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증 ․ 감	비 고
전체분 (11회변경)	7,168,000,000	7,278,000,000	증110,000,000
6차분 (3회변경)	2,255,600,000	2,365,600,000	증110,000,000

- 변경사유 : 본 공사 준공기한 연기에 따른 감리원 투입계획 변경 등

라. 준공기한 연기

구 분	당초	변경	증 ․ 감	비 고
전체분 (11회변경)	2013.01.07.~ 2019.12.20.	2013.01.07.~ 2020.02.29.	증71일
6차분 (3회변경)	2018.02.23.~ 2019.12.20.	2018.02.23.~ 2020.02.29.	증71일

- 변경사유 : 본 공사 준공기한 연기에 따라 감리용역 수행을 위해 연기

마. 예산과목 : 하천관리과, 치수및하천관리, 수방대책사업, 신월빗물저류배수시설                      설치, 시설비 및 부대비, 감리비.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 용역 변경 내역서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이병환		치수시설과장	조성만		방재시설부장	12/11 이임섭
협조자	주무관	송민섭		재무예산과장	홍수열
시행	방재시설부-18631	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스빌딩 14층) 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8773	/전송	02-3708-8756	/	bhl923@seoul.go.kr	/	대시민공개