문서번호	시설관리과-25919
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
안효민	전동근	代전동근		12/11 조세연
협 조
	주무관		최지영

`상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!‘

장기계속 단가계약 추가 발주 계획 보고 (2019년 서초구 관내 상수도 공사)

2019. 12.

강남수도사업소

(시설관리과)

장기계속 단가계약 추가 발주계획 보고

(2019년-2차 서초구 관내 상수도공사)

서초구 관내 급수공사 및 노후관 개량 등을 위하여 시행하고 있는『2019년 서초구 관내 상수도공사』의 당초 계약금액이 계약기간 내 연초에 소진될 것으로 예상되는 바, 원활한 급수공사 민원처리를 위하여 추가 발주 계획을 보고 드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2019년 서초구 관내 상수도공사 (장기계속)

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=2,600m

○ 계 약 일 : 2019.05.21

○ 공사기간 : 2019.05.22.~2020.06.30.

○ 계약금액 : ************

○ 계 약 자 : ***************

○ 감 리 자 :****************

□ 예산집행 현황 및 추가발주 사유

○ 예산집행 현황                                        (단위 :원)

구분	계약금액	기집행금액 (1차기성)	정산예정금액 (2차기성)	집행잔액	비고
도급비	***********	433,290,250	320,991,000	144,251,000

○ 추가 발주 사유

- 집행현황과 같이「2019년 서초구 관내 상수도공사 」신설 및 개량(노후 배급수관 정비) 급수공사(현재 268건 지시), 시행으로 집행잔액 금액 144,251,000원이 계약기간내 연초에 소진될것으로 예상되어 2020년 6월 30일까지 상수도 공사가 불가 할것으로 예상됨.

- 급수공사 민원처리 연속성을 위해『2019년-2차 서초구 관내 상수도공사(장기계속)』추가 발주 시행

※ 누수방지과-7295(2019.07.02.)호 : 녹에 취약한 상수도관 추가 정비계획에 의거 `19년 12월까지 한시적으로 도급비 10%이상 증액되더라도 재발주 없이 설계변경으로 시행 가능함

□ 추가발주계획

○ 공 사 명 : 2019년-2차 서초구 관내 상수도공사(단가계약)

○ 공사개요 : D=15~300㎜, L=1,300m

○ 공사기간 : 착공일 ~ 2020.06.30.

○ 발주금액(예상도급액) :***************           (단위:원)

구분	총공사비	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
계	***********	***********	**********	***********

○ 발주내역서 작성기준

- 2019년 상수도공사 기본 품셈 단가표

○ 심사요청 : 본청 계약심사과

□ 계약방법

○ 관련근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제21조(장기계속계약)

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

※ 긴급공고사유 : 민원처리(급수공사 신청) 업무의 연속성

□ 향후 추진계획

○ 공사 계약의뢰 : 2019.12.12

○ 공고, 개찰 및 적격심사 : 2019. 12월

○ 낙찰자 통보 및 계약 : 2019. 12월

○ 공사 착공(예정) : 2019. 12월 (계약일로부터 3일이내)

○ 공사 준공기한 : 2020.6.30

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.