투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(최종,2019년 포장구간내 폐아스콘 운반 및 처리용역-남부)-예산과목별 원인행위금액변경

우리사업소에서 시행중인 『20019년 포장구간내 폐아스콘 운반 및 처리용역-남부)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 20019년 포장구간내 폐아스콘 운반 및 처리용역-남부)

나. 공사기간 : 2019. 3. 12. ~ 12. 13.

다. 계 약 자 : **************

라. 설계변경(최종)내역

(단위:원)

구 분		금 액		증 ․ 감		비 고
		당 초	변 경
총 공사비		731,533,000	963,630,000	증	232,097,000	물량변경
도 급 비	공급가액	665,030,000	876,027,280	증	210,997,280
	부가가치세	66,503,000	87,602,720	증	21,099,720

마. 변경사유 : 공사물량 증·감 반영

바. 예산과목 :

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 노후포장도로정비공사, 시설비

(127,097,000원)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비

(105,000,000원)

붙  임 : 1. 설계변경(최종)내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	조재민		도로보수과장	12/11 代정철식
협조자
시행	도로보수과-7481	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145 1층 도로보수과 (대림동)	/	www.seoul.go.kr
전화	3284-5443	/전송	836-1634	/		/	부분공개(6)