문서번호	녹지관리과-4558
결재일자	2019.12.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
녹지관리팀장	녹지관리과장
허생범	12/11 권종화

2020년 산사태 예방 실시설계 용역 준공기한 연기 검토보고

2019.  12.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2020년 산사태 예방 실시설계용역

준공기한 연기 검토보고

『2020년 산사태 예방 실시설계 용역』추진과 관련하여 준공기한을 연기하고자 아래와 같이 보고합니다.

1		사업개요

□ 사 업 명: 2020년 산사태 예방 실시설계 용역

□ 위    치: 남산공원(용산구 한남동 산9-25 등 2개소)

□ 용역내용: 위험절개지 정비 실시 설계 1식

□ 사업기간: 2019. 11. 15. ~ 12. 14.

□ 계약금액: ***********************

□ 계 약 자: *************************

2		준공기한 연기 검토보고

□ 준공기한 연기

○ 당   초: 2019. 11. 15. ~ 12. 14.

○ 변   경: 2019. 11. 15. ~ 12. 26.

□ 준공기한 연기사유: 산사태 예방 실시설계 용역 심의결과 설계내역 변경 등으로 준공기간 연기

(심의일: 산지방지과 ‘19. 12. 10)

□ 연기사유 귀책소재: 중부공원녹지사업소

□ 지체상금 부과여부: 미부과.