문서번호	조경과-17669
결재일자	2019.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	조경과장
윤석채		석승우	12/12 문길동
협 조

- 물을 이용한 친수공간 조성사업 -

공사비 추가 지원 검토보고(용산구)

2019. 12.

푸른도시국

조경과

- 물을 이용한 친수공간 조성사업 -

공사비 추가 지원 검토보고(용산구)

용산구 한강로3가 69-2번지 일대 ‘물을 이용한 친수공간 조성사업’ 관련 설계변경에 따른 공사비 추가 지원 요청에 대하여 검토하고 아래와 같이 결과 보고 드림.

- 용산구 공원녹지과 - 21910호(2019.12.10.) -

□ 사업개요

○ 위    치 : 용산구 한강로3가 69-2번지 일대 (한강대교 북단 교통섬)

○ 규    모 : 2,500㎡

○ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

○ 사업내용 : 신규 수경시설(바닥분수) 설치 및 휴게공간 조성 등

○ 총사업비 : 1,000백만원 (설계비 21, 공사비 979)

□ 검토결과

○ 현장여건 반영에 따른 설계변경으로 공사비 증액 : 16,175천원

(단위:천원)

증액분	주요 설계변경 사유	검토결과
16,175	․현장여건에 따른 조경공사, 관급자재, 조달수수료 등 물량 반영	’19년 본예산 지원

○ 설계변경에 따른 증액분 공사비를 용산구에 재배정하여 연내 공사가 원활히 준공될 수 있도록 신속히 지급

□ 조치계획

○「물을 이용한 친수공간 조성사업」예산을 활용 용산구 지원

(단위:천원)

예산현액	기 재배정액	재배정 잔액	금회 지원액	비 고
1,000,000	979,804	20,196	16,175	시설비

○ 예산과목 : 푸른도시국 조경과, 생활주변 녹지확충, 생활주변 녹지확충,

물을 이용한 친수공간 조성, 시설비및부대비, 시설비

붙임  공문 등 관련 자료(용산구) 각1부.  끝.