문서번호	시설보수과-7779
결재일자	2019.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김종범		12/12 임영철
협 조
	기전과장			정판식
	주무관			박근용
	주무관			이평주
	주무관			김종섭

설계변경 검토보고

(일원터널정밀안전진단외1개소정밀점검용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.12.

서울시동부도로사업소

(시설보수과)

설계변경 검토보고

(일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역)

우리사업소에서 시행중인 「일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역」에 대한 설계변경 시행 검토 보고임

1		용역 현황

○ 용 역 명 : 일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역

○ 용역기간 : 2019.3.26 ~ 2019.12.24.

○ 도 급 자 : (사)대한산업안전협회 대표 윤양배 외 1

○ 도 급 비 : 179,340,000원

○ 예산과목

- 서울시 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비          ‣ 당초 : 179,340,000원, 변경 : 167,071,470원

- 성남시 : 세입세출 외 현금

‣ 당초 : 0원, 변경 : 11,018,530원

2		설계변경 사유

○ 자문비 감액

- 중간보고 및 최종보고 자문(2회, 10인) 시행에 따른 자문위원 자문비 정산(감)

○ 위례터널 분담금 구분

- 서울시 65%, 성남시 35%

3		설계변경 내역

○ 총괄

(단위 : 원)

구 분		용 역 비				비 고
		당 초 (서울시)	변 경
			계	서울시	성남시
총용역비		179,340,000	178,090,000	167,071,470	11,018,530
도급비	공급가액	160,990,909	160,990,909	150,974,063	10,016,846
	부가세	16,099,091	16,099,091	15,097,407	1,001,684
	자문비	2,250,000	1,000,000	1,000000	0
	계	179,340,000	178,090,000	167,071,470	11,018,530

○ 일원터널

(단위 : 원)

구 분		용 역 비(서울시)			비 고
		당 초	변 경	증 ․ 감
총용역비		147,858,481	146,608,481	감)1,250,000
도급비	공급가액	132,371,346	132,371,346	-
	부가세	13,237,135	13,237,135	-
	자문비	2,250,000	1,000,000	감)1,250,000
	계	147,858,481	146,608,481	감)1,250,000

○ 위례터널

(단위 : 원)

구 분		용 역 비			비 고
		당 초 (서울시 100%)	변 경
			서울시(65%)	성남시(35%)
총용역비		31,481,519	20,462,989	11,018,530
도급비	공급가액	28,619,563	18,602,717	10,016,846
	부가세	2,861,956	1,860,272	1,001,684
	자문비	0	0	0
	계	31,481,519	20,462,989	11,018,530

4		조치의견

○ 변경사항에 대하여 설계변경 시행하고 관리단속과에 변경계약 의뢰코자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.