투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 변경 요청(노을 가족캠핑장 면 정비공사(조경))

1. 공원여가과-1549(2019.10.24.)호와 관련입니다.

2. 위 호관련 우리 사업소에서 시행 중인 「노을 가족캠핑장 면 정비공사(조경)」에 소요      되는 관급자재를 아래와 같이 납기변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명: 노을 가족캠핑장 면 정비공사(조경)

나. 변경내역

납품요구번호	물품식별번호	품 명	규 격	단위	납기변경		비 고
					당 초	변 경
12-19-1 -94781-00	21260190	세라믹 벽돌	230*114*60mm	매	2019.11.23.	2019.12.20.	수량변경 없음

다. 변경사유: 도급공사 현장 공정에 따른 사용시기 미도래

라. 연기사유 귀책부서: 서부공원녹지사업소

마. 지체상금 부과여부: 미부과.  끝.

	공원여가과장
주무관	한소진		주무관	代천영자		공원여가과장	12/12 강현주
협조자
시행	공원여가과-1853	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/
전화	02-300-5576	/전송	02-300-5581	/	eric0503@seoul.go.kr	/	부분공개(5)