문서번호	교통정보과-8404
결재일자	2019.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운수정보팀장	교통정보과장
안종휘		김필래	12/12 이수진
협조

모바일 번호판영치 간편민원 서비스 구축 준공검사(수) 결과보고

2019. 12.

교통정보과

운수정보팀

모바일 번호판영치 간편민원 서비스 구축 사업

준 공 검 사 (수) 결 과 보 고

모바일 번호판영치 간편민원 서비스 구축 사업이 마무리됨에 따라 그간의 사집추진경과 및 결과를 최종 검수하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		사업 개요

○ 사업명: 모바일 번호판영치 간편민원 서비스 구축

○ 사업기간: ’19. 04. 25.~’19.12. 20.

○ 사업자: ********

○ 계약금액: 금176,935천원(부가가치세 포함)

○ 계약방식: **************

○ 사업범위

- 모바일 번호판영치 간편민원 서비스 개발(모바일 웹)

- 상용 S/W 신규 도입   ※ H/W 도입(클라우드 센터 제공)

- 정보시스템 감리대응 등

○ 예산과목

- 교통정보과, 과학적인 교통정보서비스 구현, 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정), 자동차관련(번호판영치, 특사경, 과태료)시스템 운영, 전산개발비(202-207-02) 및 자산및물품취득비(202-405-01)

Ⅱ		사업내용

□ 모바일 번호판영치 간편민원 서비스 개발(모바일 웹)

본인인증, 번호판 영치 관련 법규 안내, 영치 및 번호판 반환 안내, 납부 안내, 영치기본정보조회, 자동차과태료 체납 세목조회, 주정차과태료 체납세목조회, 자동차세 체납 세목조회, 납부내역조회, 영치 및 반환내역조회, 사전안내장발송조회, 공시송달조회, 상담내역조회, 영치 번호판 맵 연계 위치 조회, 영치 자치구 맵 연계 위치조회, 문자알림동의등록 및 조회, 자동차 과태료, 주정차과태료, 자동차세 이텍스 수납연계처리 등

□ 모바일 번호판영치 간편민원 서비스 구축을 위한 자치구 사전 의견 수렴 요구사항 검토 적용

○ 불특정 본인 인증방법 검토 적용

○ 납부방법(계좌이체, 신용카드 결제 등)

○ 단속현장에서 번호판 즉시 반환방법 검토 적용

○ 전자고지를 위한 문자알림 동의방법 검토 적용

○ 모바일웹 호환성, 도메인 및 디자인

□ 상용S/W 신규 도입(총 3종 3식)

연번	용 도	수 량	대상시스템	신규 도입 사유
1	WEB	1	모바일 번호판영치 간편민원 서비스	모바일 번호판영치 간편민원 서비스 WEB
2	WAS	1	모바일 번호판영치 간편민원 서비스	모바일 번호판영치 간편민원 서비스 WAS
3	DB 암호화	1	영치및특사경 DB	영치 및 특사경 DB 이중화 구성을 위한 DB암호화 솔루션

Ⅲ		추진경과

○ ’19. 4. 25.: 계약체결 및 과업수행

○ ’19. 5. 10.: 착수보고 실시

○ ’19. 6. 26.: 분석(업무프로세스 정의, 요구사항 정의)

※ 자치구 현장 방문 인터뷰 진행(마포구청, 강북구청, 서초구청)

○ ’19. 7. 23.: 시스템연계 사전협의

□이택스시스템 실시간 납부연계: PC납부 UR지원, 모바일웹은 ’20년 지원

□서울시 홈페이지 연계(공통GNB사용, 영치간편민원 메뉴생성 및 내용등록등)

□도메인총량제로 인한 Cartax홈페이지 도메인(Cartax.seoul.go.kr)공동 이용에 따른 네트워트 검토 협의(데이터센터, 클라우드센터)→신규 도메인 등록

□도메인 신규등록 승인 완료(youngchi.seoul.go.kr): 서울시 네임서버 등록

□의무보험가입유무 실시간 조회 연계 요청 검토결과(지역정보개발원)

※ 위택스시스템과 세무종합시스템을 통한 영치차량 반환 차량 의무보험가입여부 확인

□본인인증은 문자인증만 채택

○ ’19. 7. 23.: 설계(디자인시안, 화면설계, 데이터베이스 설계)

○ ’19. 8. 16. ~ ’19.10.31. : 감리추진

○ ’19. 9. 3. : 중간보고 실시

※ 모바일웹 메인화면 디자인 시안 수정

○ ’19. 10. 18.: 계약변경(기간연장)

※ (변경전)’19.10.25. → (변경후)’19.12.20.(56일 기간연장)

*********************************************

○ ’19. 10. 22.: 진행경과보고

○ ’19. 11. 29.: STAX앱 연계모듈 개발

○ ’19. 12. 10.: 종합 테스트

Ⅳ		시스템 세부 구축내용

□ 서비스 주소: https://youngchi.seoul.go.kr/

□ 서비스 사용자

○ 영치대상 민원인

○ 서울시 및 25개 자치구 업무담당자(영치담당)

□ 서비스 구축내용

○ 정보안내: 영치 및 번호판반환안내,납부안내 등

○ 체납조회 및 납부: 전체체납, 자동차과태료체납, 주정차과태료체납, 자동차세체납 등

○ 납부확인: 납부내역, 의무보험가입

○ 영치정보: 영치내역, 사전안내장발송, 공시송달, 상담이력, 문자알림동의

○ 번호판위치: 번호판위치, 자치구위치, 번호판반환요청

□ 서비스 구성도

************

*

***********

*

Ⅴ		준공검수(사) 결과

□ 검수기간: ’19. 12. 11.(수)~’19. 12. 12.(목)

□ 검수방법: (붙임) 최종검수내역으로 과업수행여부 확인

※ 요구사항에 대한 목록: 기능·비기능 요구사항 내용, 산출물 등이 포함

□ 검수자: 사업 담당자(전산6급 안종휘) 외 1명 입회

□ 검수결과: 적정

Ⅵ		예산사항

□ 예산과목 및 집행내역

○ 예산과목

- 교통정보과, 과학적인 교통정보서비스 구현, 과학적 교통운영체계 구축(교통관리계정), 자동차관련(번호판영치, 특사경, 과태료)시스템 운영, 전산개발비(202-207-02) 및 자산및물품취득비(202-405-01)

○ 금회지급

구 분	계	금회지급	선금지급	비고
계	176,935,000원	88,467,500원	88,467,500원
전산개발비	113,962,320원	56,981,160원	56,981,160원
자산및물품취득비	62,972,680원	31,486,340원	31,486,340원

Ⅶ		향후계획

□ 준공검수(조서) 성과물 인수: ’19. 12. 12.

□ 준공검수(조서) 준공서 제출: ’19. 12. 12.~ 12. 16.

□ 시범운영 및 교육, 홍보, 사업관리시스템 등록: ’20.1월

□ 시스템 하자보수: 검수일로부터 ~ ’20. 12. 31.

□ 서비스 개시: ’20. 2월중(예정)

붙임: 1. 최종 검수내역(별첨) 1부.

2. 산출물 내역 1부.

3. 상용소프트웨어(3종) 라이선스 및 기술지원확약서,

웹접근성 품질인증서 1부.  끝.

(#붙임2) 산출물 내역

단 계	산 출 물 목 록	작성여부	검증자
착수단계	SG1. 사업수행계획서	O	안종휘
	SG2. 품질활동계획서	O
	SG3. 개발표준정의서	O
요구분석	RQ1. 용어정의서	O
	RQ2. 메뉴구성도	O
	RQ3. 현행 시스템분석서	O
	RQ4. 인터뷰 결과서	O
	RQ5. 업무흐름도	O
	RQ6. 요구사항 정의서	O
기본설계	BD1. 사용자화면정의서	O
	BD2. 데이터모형설계서(ERD)	O
프로젝트 시작	PS1. 적용대상 산출물 목록표	O
상세설계	DD1. 메뉴구성도(정제)	O
	DD2. 사용자화면 정의서(정제)	O
	DD3. 코드설계서	O
	DD4. 데이터모형설계서(ERD정제)	O
	DD5. 테이블목록	O
	DD6. 테이블정의서	O
프로젝트 진행	PP1. 품질활동계획서	O
	PP2. 프로젝트 진척보고서(주간)	O
	PP3. 프로젝트 진척보고서(월간)	O
	PP4. 테스트계획서	O
	PP5. 통합테스트수행보고서	O
	PP6. 요구사항추적표	O
	PP7. 위험관리	O
	PP8. 회의록	O
개발	DV1. 프로그램 목록	O
	DV2. 프로그램 명세서	O
	DV3. 프로그램대테이블상관도	O
	DV4. 단위테스트 수행보고서	O
	DV5. 통합테스트 수행보고서(정제)	O
	DV6. 사용자지침서	O
	DV7. 운영자지침서	O
인수	TR1. 인수테스트계획서(정제)	O
	TR2. 인수테스트수행보고서(정제)	O
	TR3. 사용자지침서(정제)	O
	TR4. 운영자지침서(정제)	O
	TR5. 사용자교육계획서	O
프로젝트종료	PE1. 품질활동결과보고서	O
	PE2. 프로젝트완료보고서	O

(#붙임3) 상용소프트웨어(3종) 라이선스 및 기술지원확약서, 웹접근성 품질인증서

□ WEB/WAS(WebtoB5/ Jesus8)

○ 라이선스

○ 기술지원 확약서

□ DB 암호화: 애슬론2.5

○ 라이선스

○ 기술지원 확약서

□ 웹접근성 품질인증서