문서번호	시설과-3147
결재일자	2019.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
신상현	조민형	代조민형	12/12 代배기선
협 조

『보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사』

준공기한 연기 검토보고

2019. 12.

동부공원녹지사업소

(시    설    과)

『보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사 」와 관련, 시공사로부터 준공기한 연기요청이 있어 아래와 같이 보고 드림.

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사

❍ 위    치 : 보라매공원외 2개소(응봉공원, 길동생태공원)

❍ 기    간 : 2019. 11. 27. ~ 2019. 12. 20.

****************************

*********************************

❍ 공사내용 : 노후포장 및 목재계단 정비 등

2		실정보고 사항 및 검토의견

❍ 실정보고 사항

- 동절기 기온 저하로 콘크리트 타설 등 품질관리에 어려움이 있어 준공기한 연기요청

❍ 검토의견

- 동절기에 포장공사(콘크리트. 흙콘크리트, 탄성포장, 아스팔트 등) 시 품질 저하 및 하자 발생 우려가 크므로 공사기간을 동절기 이후로 조정

3		조치계획

❍ 포장공사의 품질 확보를 위해 준공기한 연기

- 당초 : 2019. 11. 27. ~ 2019. 12. 20.

- 변경 : 2019. 11. 27. ~ 2020. 03. 31. (102일)

❍ 계약부서에 준공기한 연기 요청(→공원운영과)

붙임  관련문서 1부.  끝.