문서번호	설비부-20532
결재일자	2019.12.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	12/12 임정규
협조

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 통신공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

2019. 12

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 통신공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 공사 』와 관련 건설사업관리단으로부터 CCTV 설계변경과 토목공사 준공기한 연기에 따른 통신공사 공사기간 조정에 대한 서류가 접수되어 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 통신공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31.

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리(연장810m)

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 지하차도 320m

□  시 공 사 : *******

□ 공사금액 : *********************

2		관련근거

□ 한해기 제2019-234호(`19.11.29): 감리단 통신공사 실정보고

□ 북부도로사업소 기전과-5590(`19.6.7): 지하차도 업무협의 회신

□ 사각지대 우려로 지하차도 내·외부 CCTV 추가 설치 요청 등

□ 혜화경찰서 생활안전과-3876(`16.8.19): 지하보도 CCTV 등 강화 권고

3		설계변경 및 준공기한 연기 내용

□ 설계변경 사유 : 유관기관(혜화경찰서, 북부도로사업소) CCTV         추가 설치 요청에 따른 물량 증가

○ 주요 변경 내용

공종	주요 변경사항	변경 사유	직접비 (단위:천원)
CCTV 설비	[창경궁 보도BOX] ·CCTV설치(도급) 증)5대 ·CCTV설치 물량 증가에 따른 배관배선 물량 증가	`16.9월 설치 완료된 종묘측 보도BOX와 동일하게 설치하여 사각지대 최소화	********
	[지하차도(차량통행) 내·외부] ·CCTV(관급) 설치 4대→8대 ·설치수량 증가에 따른 배관 배선 물량 증가	[북부도로사업소 요구사항 반영] -지하차도 내·외부 사각지대 최소화 하기 위해 추가
	·CCTV케이블 규격 변경 UTP→광케이블	CCTV렉으로부터 거리가 먼 부분은 신호감쇄로 광케이블설치
<직접비 소계>			********
<제경비 소계>			********
<도급비>			********

□ 준공기한 연기사유 : 선행공정인 토목공사에서 준공기한(`19.12.31→         `21.6.30) 연기하여 통신공사 준공기한 조정 필요

□ 계약변경 내용                                        (단위:원)

차수	계약금액		공사기간
	당초	변경	당초	변경
총차	***********	*********** *************	`14.5.15~ `19.12.31	`14.5.15~ `20.12.31(증12개월)
4차	***********	*********** *************	`19.1.15~ `19.12.31	`19.1.15~ `20.12.31(증12개월)

□ 건설사업관리자 검토의견

○ CCTV설치 변경은 기 실정보고 승인된 공사비를 적절히 반영하였으며,              통신공사 준공기한은 토목공사 준공기한 연기에 따라 조정하는 것이 타당함.

4		보고자 의견

□  위 설계변경 내용은 `16.08월 종묘측 보행자 통로 BOX개통 시 혜화        경찰서 요구 및 향후 시설물 관리기관인 북부도로사업소의 요청에          의해 CCTV추가 설치하는 것으로 설계변경 사항을 검토한 바 적절히        반영되었으며,

□  선행공사 준공기한 연기에 따라 통신공사 사업기간 연기하는 것이         적정하다고 판단되므로 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서(총차/4차) 각 1부.

3)제비율 검증확인서 1부. 끝.