투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	「보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사」준공기한 연기 의뢰

1. 시설과-3147호(2019.12.12.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 『보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사』와 관련, 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 외 2개소 노후포장 등 정비공사

나. 도 급 액 : 금54,364,400원

다. 공사기간 : 2019. 11. 27. ~ 2019. 12. 20.

라. 도 급 자 : 라텍씨앤씨㈜ 대표 박기춘

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2019. 11. 27. ~ 2019. 12. 20.

- 변  경 : 2019. 11. 27. ~ 2020. 03. 31.(102일 연장)

바. 연기사유

- 동절기에 포장공사(콘크리트 등) 시 품질 저하 및 하자발생 우려가 크므로 공사기간을 동절기 이후로 조정

사. 공사비 변경 : 없음

아. 지체상금 : 미부과

붙  임 : 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	신상현		시설관리팀장	조민형		시설과장	12/12 代조민형
협조자
시행	시설과-3160	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1161	/전송	02-2181-1169	/	sshydp@seoul.go.kr	/	부분공개(5)