문서번호	기반시설과-4160
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
이건용		代정창수	12/13 전영주
협조

설계변경 시행 보고

[신마포나들목 신설 전기공사]

2019. 12.

한강사업본부

(기반시설과)

설계변경 시행 보고

〈신마포나들목 신설 전기공사〉

「신마포나들목 신설 전기공사」시행 중 현장 여건으로 인한 계약 내역이 변경되어, 이에 설계 변경 및 정산을 실시하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 신마포나들목 신설 전기공사

○ 공사기간: 2019. 02. 12. ~ 2020. 02. 11.

○ 공사규모: 나들목 조명공사, 육갑문 전력간선, CCTV 설치

○ 도 급 액: 금96,336,990원

○ 도 급 자: 주식회사 세정산업(대표자: 박순례)

□ 설계 변경 현황

○ 설계 변경 근거

- 기반시설과-564(2019. 03. 07.): 실정보고 1차

- 기반시설과-3978(2019. 11. 29.): 실정보고 2차

- 기반시설과-4072(2019. 12. 10.): 업무지시서

○ 설계 변경

구 분		당 초	변 경	증, 감
총 공 사 비		**********	**********	*********
도급액	공 급 가 액	**********	**********	*********
	부 가 세	*********	*********	*******
	도 급 액	**********	**********	*********

□ 조치 계획

○ 상기와 같은 내용으로 설계변경을 시행하고 공사 추진에 만전을       기하고자 함

붙임 1. 실정보고 검토 보고서(1차) 1부

2. 실정보고 검토 보고서(2차) 1부

3. 업무지시서 1부

4. 설계변경(정산) 보고서(서울시설공단) 1부

5. 변경내역서 1부.  끝.