문서번호	급수운영과-28097
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최선보	문병희	김정수	12/13 배현숙
협 조
	주무관		김영화
	행정관리팀장		송성하

2019년 회계연도 사고이월 보고

(고척동 320번지외 8개소 배급수관 정비공사)

2019. 12.

강서수도사업소

급수운영과

2019년 회계연도 사고이월 보고

(고척동 320번지외 8개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행예정인『고척동 320번지외 8개소 배급수관 정비공사』와 관련 사고이월 사유가 발생되어 보고 드림.

Ⅰ		공 사 현 황

❍ 공 사 명 : 고척동 320번지외 8개소 배급수관 정비공사

❍ 공사개요 : D=150~300㎜ L=2,759m

❍ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 290일(계약의뢰 예정)

❍ 발주 도급금액 : 금981,970,000원

❍ 시 공 사 : 미정

❍ 공 정 율 : 계약의뢰 예정

Ⅱ		예산집행 내역

❍ 예산 과목

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비,노후 상수도관|
(배급수관) 정비

❍ 집행 내역                                                    (단위 : 천원)

예산액 (A)	예산현액	배정액	지출원인행위액 (B)	지 출 액 (C)	사고이월액 (D=A-C-E)	불용액 (E)
1,896,300	1,896,300	1,896,300	-	-	1,896,300	미정

※ 불용액 : 계약 예정으로 미정

Ⅲ		사고이월 사유

❍ 2019년 당초 노후 배급수관 정비계획은 6.7㎞였으나 문래동 혼탁수 발생으로

향후(’20년 이후) 연차별 정비 계획된 5.3㎞를 7월 이후 추가로 정비토록 본부에서 지시받아 총 12.0㎞중 9.2㎞를 정비완료(잔여연장 2.8㎞)

❍ 미정비된 2.8㎞는 주(主)가 2018~2019년 도로 포장되어 굴착불가된 구간으로 부시장방침(노후관 정비-구청 협조요청)으로 추가 협의를 지속적으로 진행하였으나, 도로관리청의 도로굴착 통제기간내 추가 굴착허가 불허 및 포장불가로 노후관 정비가 중단된 실정임.

※관련문서 서울특별시 도로관리과-17382(2019.11.1.)

	관련 규정
▸ 지방공기업법 제30조, 시행령 제24조 ▸ 지방재정법 제50조, 시행령 제58조

Ⅳ		조치 의견

❍ 상기 보고 내용과 같이 금년도에 미정비된 구간을 수합하여 발주중으로 금년내 공사 준공처리가 불가하므로 사고 이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 사고이월 요구서 1부

2. 이월사업별 명세서 1부.

3. 지출원인행위 미필의 이월명세서 1부.  끝.