문서번호	급수운영과-28129
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		★강서수도사업소장
김정운	문병희	김정수		12/13 배현숙
협 조
	행정관리팀장		송성하
	주무관		김영화
	주무관		최선보
	주무관		홍은철

2019년 회계연도 사고이월 보고

(오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사)

2019. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2019년 회계연도 사고이월 보고

(오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인『오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사』와 관련 사고이월 사유가 발생되어 보고 드림.

Ⅰ		공 사 현 황

❍ 공 사 명 : 오류동 118-39 외 1개소 송배수관 정비공사

❍ 공사개요 : D=100~500mm L=1,500m

❍ 공사기간 : 2019. 9. 16. ~ 2020. 2. 14.

❍ 계약금액 : ***************

❍ 시 공 사 : ***************

❍ 공 정 율 : 55% - 1구간 770m 부설완료

2구간 730m 부설예정

Ⅱ		예산집행 내역

❍ 예산 과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비,

중블록별 무단수 급수체계 구축

❍ 집행 내역                                                    (단위 : 천원)

예산액 (A)	예산현액	배정액	지출원인행위액 (B)	지 출 액 (C)	사고이월액 (D=A-C-E)	집행잔액 (E)
*********	*********	*********	*********	*******	*********	*******

※ 집행 잔액 = 낙찰 차액(*********)

Ⅲ		사고이월 사유

❍ 해당 사업은 기존 계획되었던 「신방화사거리~공항대로 송배수관 부설공사」가 서울지방국토관리청에서 시행하는 「광명~서울 고속도로 민간투자사업」과 공사구간이 중첩되어 교통승인이 불가하여 3분기에 대체구간으로 선정된 사업임.

❍ 당초 계약기간 `19.9.16.~`20.2.14.로 계속 진행중인 공사임.

❍ 미부설된 2구간은 편도 1차선 구간으로 대규모주택단지, 대학교 등이 인접해있어 공사로 인한 대중교통 통행이 불가함에 따라 주민과의 협의 및 버스회사와의 협의 기간이 필요한 실정임.

❍ 굴착구간 해당 관리청과 협의하여 공사를 진행하려 하였으나, 동절기 굴착통제기간이 `19.11.21.~`20.2.28.로 시행되어 통제기간 내 공사진행이 불가능한 실정임.

※관련문서 서울특별시 도로관리과-17382(2019.11.1.)

	관련 규정
▸ 지방공기업법 제30조, 시행령 제24조 ▸ 지방재정법 제50조, 시행령 제58조

Ⅳ		조치 의견

❍ 상기 보고 내용과 같이 금년도에 공사 준공처리가 불가하므로 사고이월하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 사고이월 요구서 1부

2. 이월사업별 명세서 1부.

3. 지출원인행위부 1부.

4. 지출부 1부.

5. 지출원인행위 미필의 이월명세서 1부.

6. 공사계약서 1부.  끝.