문서번호	기전과-11105
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이지영		12/13 代이동훈
협조

『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

제5차 작업지시 실정보고 검토 보고

2019. 12.

동부도로사업소

(기전과)

『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』

제5차 작업지시 실정보고 검토 보고

『2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)』제5차 작업 추진 중에 실정보고가 접수되어 검토하고 보고드림.

1		관련근거

제2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가) 5차 작업지시

❍ 기전과-10174호(2019. 11. 25.)

3차 작업지시 실정보고서 제출

❍ ㈜동해종합기술공사 감리부-본-1209(2019. 12. 12.)

2		공사개요

공 사 명 : 2019년 교통안전표지 유지보수공사(연간단가)

공사내용 : 강남구, 송파구, 강동구, 서초구 일부 시도

계약업체 : ㈜동아특수건설 대표 심석래

계약금액 : 금119,891,960원(금일억일천구백팔십구만일천구백육십원정)

계약기간 : 2019. 3. 5.(화) ~ 12. 27.(금)

감리업체 : ㈜동해종합기술공사

3		제2차 작업지시 내용

작업기간 : 2019. 11. 22.(금) ~ 2019. 12. 20.(금)

작업대상 : 송파구 삼전동 62 외 12건

4		실정보고 내용

지시번호	위 치	작업지시 사항	보고내용	감리의견	비 고
5차-4	송파구 신천동 올림픽로 35길	비보호좌회전 판 신설	- 선행공정(신호등) 지연으로 설치 불가	적 정
5차-7	송파구 양재대로 한국체육대교차로	비보호좌회전 판 신설	- 선행공정(신호등) 지연으로 설치 불가	적 정
5차-8	교통사고 잦은 곳 개선공사 (역삼역교차로 외 10개소)	교통안전표지 신설 및 철거, 이설 등	- 선행공정(신호등)에서 교통안전표지 철거 하여 철거 부분 제외	적 정
5차-9	교통사고 잦은 곳 개선공사 (송파경찰서 외 1개소)	교통안전표지 신설 및 철거, 이설 등	- 선행공정(신호등)에서 교통안전표지 철거 하여 철거 부분 제외	적 정
5차-12	도로교통 소통 개선공사 (송파구 가락시장교차로)	교통안전표지 신설 및 철거, 이설 등	- 선행공정(신호등)에서 교통안전표지 철거 하여 철거 부분 제외	적 정

5		조치의견

감리업체로부터 접수된 실정보고에 대하여 검토한 결과

적합하여 승인하고 추후 정산하고자 함

붙  임 : 감리업체 제5차 작업지시 실정보고 1부.  끝.