문서번호	시설관리과-26162
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박준기		권승계	12/13 고신석
협조

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

(상도동 246-2~245-1번지 외 6개소 배급수관 정비공사)

2019. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

(상도동 246-2~245-1번지 외 6개소 배급수관 정비공사)

『상도동 246-2~245-1번지 외 6개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울시설공단으로부터 현장 실정보고가 제출되어 검토 후 보고드림

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 상도동 246-2~245-1번지 외 6개소 배급수관 정비공사

○ 공사기간 : 2019.04.15.~2019.12.26.

○ 도 급 액 : 916,237,000원

○ 공사개요 : D=80~300mm, L=2,489m

○ 계약업체 : 한경건설(주) 대표 홍진호

□ 관련공문

○ 공사현장 실정보고 제출(사토장 변경 외 1건):공사감독2처-20433(2019.12.11.)

□ 실정보고 내용

○ 사토장 변경

- 현황 및 문제점

․ 발생토 불량에 따른 수도권매립지 반입 불가

․ 현장에서 발생된 굴착토가 불량하여 수도권매립지관리공사로부터 부적합 판정을     받아 반입불가 통보.

※ 관련근거 : 매립지관리처-3589(2019.12.10.)

- 검토의견

․ 변경 사토장의 현장 확인결과 사토장으로 사용가능한 부지 면적(69,668㎡)을    확보하고 있으며, 개발행위 허가사항, 운반거리, 진입로 등이 사토장으로 사용    하기에 적정한 것으로 판단됨

․ 사토장 변경에 따른 거리 증가로 인하여 단가는 당초에 비해 증가하였으나 기존   계약단가로 적용

※ 운반단가 비교 (당초 : 13,223원 → 변경 24,548원)

- 개략공사비 : 증․감 없음

○ 철개고정장치 사급 적용

- 현황 및 문제점

․ 당초 원형철개 고정장치 설치는 재료비 별도로 되어 있으나 사급자재에 철개고정           장치가 누락 되어 있음.

- 검토의견

․ 철개고정 일체형이 아닌 원형철개(관급출고)는 철개고정장치를 사급자재로 반영             하고자 함. (소화전 철개 11개, 공기밸브 철개 2개)

- 개략공사비 : 증)약3,259천원[13개× 250,704원(공통대가)]

□ 조치의견

○ 상기 사항에 대하여 우선 공사 시행하고, 향후 설계변경에 반영토록 서울시설공단에 회신코자 함  끝.