문서번호	설비부-20698
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		열빛총괄과장	설비부장
김도형		여인웅	12/13 임정규
협조

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』

기성검사(2차 2회) 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사』

기성검사(2차 2회) 완료 보고

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(2차)』에 대한 기성 검사 결과(2차2회)를 제출 받아 검토하고 보고 드림

공사개요

□ 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□ 위    치 : 서울 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

□ 공사규모 : 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

- 총인 412,000㎥/일(TP 0.13㎎/L)+ 비총인 416,000㎥/일(TP 0.18㎎/L) ⇒ 혼합방류(TP 0.46㎎/L)

□ 공사기간 : 2017.11.20.~2020.6.30.(2차 2018.10.10.～2020.6.30)

□ 공사금액 : 2,478백만원(2차 1,703백만원)

□ 도 급 자 : ㈜영풍진흥기업

□ 감 리 사 : ㈜천일, 동부엔지니어링(주), ㈜범창종합기술

추진 현황

□ 2013.05. : 물재생센터 총인처리시설 설치계획 수립(행정2부시장 방침)

□ 2014.08. : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치계획 방침

□ 2017.03. : 실시설계 용역 완료

□ 2017.11. : 기계설비공사 계약 및 1차공사 착공

□ 2018.09. : 기계설비공사 1차분 준공

□ 2018.10. : 기계설비공사 2차분 착공

□ 2019.05. : 기계설비공사 2차분 기성(2차1회)

관련근거

□ 기성검사(2회) 결과 보고(중랑물재생센터 총인처리시설 기계설비공사)

□ 천일(감리)제19-2367호(2019.12.13.)

기성부분 검사 내용

□ 기성부분준공일자 : 2019. 12. 05

□ 기성부분검사일자 : 2019. 12. 12

□ 기성부분준공금액 : 금251,330,000원

구분	계약금액(원)	기성준공금액(원)			잔액(원)	기성율
		전회	금액	누계
2차	1,703,193,000	122,430,000	251,333,000	373,760,000	1,329,433,000	21.95%

□ 기성부분검사자

- 기계분야 기술지원기술자 김상배, 소방분야 기술지원기술자 이정수

□ 기성부분검사결과

- 검사원으로 임명받아 제2회 기성부분에 대하여 검사한 결과 전 공사에 대하여 그 기성 공정을 14.76%(누계 21.95%)로 인정함

기성부분 지급

□ “중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(2차)” 계약 건에 대한 채권압류 및 전부명령

□ 관련근거 : 서울서부지방법원2019타채6442

- 채권자: 대원엠이씨 주식회사

- 채무자: 영풍진흥기업 주식회사

- 제3채무자: 서울특별시

□ “제3채무자는 채무자에게 위 채권에 관한 지급을 하여서는 안된다”는 주문내용에 따라 기성부분 댓가를 채무자(대원엠이씨 주식회사)에 지급

조치계획

□ 건설사업관리단에서 실시한 검사결과와 같이 기계공사(2차)가 적합하게 기성부분 준공되었기에 기성부분 준공처리하고자 함

붙임 1) 기성검사보고서(감리단) 1부.

2) 기성내역서(2차2회) 1부.  끝.