투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(최종) 계약 요청(자전거도로 유지보수공사(연간단가) 외 1건 건설폐기물처리용역)

우리과에서 시행중인 「자전거도로 유지보수공사(연간단가) 외 1건 건설폐기물처리용역」를 아래와 같이 설계변경하였기에 변경 계약 요청합니다.

1. 용 역 명 : 자전거도로 유지보수공사(연간단가) 외 1건 건설폐기물처리용역

2. 용역내용 : 자전거도로 유지보수공사 및 노후 자전거도로 정비공사 폐기물 처리

3. 용역기간 : 2019. 3. 20. ~ 2019. 12. 30

4. 용 역 사 : 대우산업(주) 대표 박덕순

5. 변경사유 : 자전거도로 정비에 따른 물량 증·감 및 용역비 변경

6. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 ․ 감(원)	비 고
용 역 비	62,705,200	109,129,000	증) 46,423,800
공급가액	57,004,727	99,208,182	증) 42,203,455
부가가치세	5,700,473	9,920,818	증) 4,220,345

붙임  1. 설계변경 시행보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	석기철		시설관리과장	12/12 代김연배
협조자
시행	시설관리과-3591	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-24) 한강사업본부	/
전화	02-3780-0647	/전송	02-3780-0744	/	skc7571@seoul.go.kr	/	부분공개(5)