문서번호	동북권사업과-12112
결재일자	2019.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		발전기획팀장	동북권사업과장
황인태		오대중	12/12 오장환
협조

창동·상계 동서간 연결교량 건설공사 기본 및 실시설계용역

자문회의 결과보고

2019. 9.

창동·상계 동서간 연결교량 건설공사 기본 및 실시설계용역

자문회의 결과보고

창동·상계 동서간 연결교량 건설공사 기본 및 실시설계 용역 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 자문회의(2차) 개요

〇 일     시 : ’19. 12. 6.(금) 14:00 ~ 16:00

〇 장     소 : 청계별관 7층 회의실

〇 참 석 자(15명)

- 서울시 : 지역발전본부장, 동북권사업과, 도로계획과, 도기본 토목부(교량건설과, 토목설계과)

- 전문가 : 김진환(교통), 곽창진(토질및기초), 김상현(도로), 원종진(토목구조), 이한세(수자원) 등

- 용역사 : ㈜동해종합기술공사 최길(책임기술자)

〇 보고내용

- 하천구역 개발을 최소화하는 구조물 계획 적정여부

- 하천제방 개발 및 훼손에 따른 제체안전성 적정여부

- 교량설치에 따른 수위상승, 수리영향 적정여부

- 보차도교 홍수위 여유고 확보방안 적정여부

- “중랑천 홍수방지 및 생태복원 종합계획”과의 연계성 적정여부 등

□ 자문 의견

김진환 위원(교통, 진성)

〇 보･차도교 진입부 선형에 대해 서울아레나측과 적극적인 협의를 통해 선형개선 필요

〇 연결교량→마들로 우회전 진입 회전반경 기준 재검토

곽창진 위원(토질 및 기초, 극동ENG)

〇 보행교 아치리브에서 발생 하중(수직력 및 인발력)을 고려한 기초 규모 상세검토

〇 보행교 행어케이블 설치수 및 단면에 대한 상세검토 필요

〇 하천정비계획선 내에 있는 구조물기초에 대해서는 기초규모 최적화 방안 검토

〇 기존 동부간선도로 지하차도 구조물에 대한 영향을 최소화할 수 있도록 터파기 계획 수립 필요

〇 보차도교 시점부 파일 기초시공시 장비의 하중규모를 고려, 기존 수로암거의 안전성 사전 검토 필요

〇 제방안전성은 기초시공 후 되메우기 토사조건을 반영하여 안전율의 변화 검토 필요(지장물조사 및 토층조건 확인 등)

김상현 위원(도로, 하이콘ENG)

〇 보행교에 대해서는 노면 배수불량이 발생되지 않도록 자재선정 및 배수계획을 수립할 것

〇 보･차도교 진입부 선형 개선을 통해 주행안전성 확보 방안 검토

〇 전방향 횡단보도는 선형개선 방안 등을 고려하여 결정 필요

원종진 위원(토목구조, 한국종합기술

〇 보･차도교 홍수위 여유고 확보를 위해 강상판형교 변단면 추가 검토 필요 (시점부 형고 최소화 방안 고려)

〇 보행교 아치부재에 대한 크라운비 및 교량공학(안) 제시안 검토 필요

〇 보･차도교 시점부 수로암거 저촉부 교각 설계시 기존 수로암거 설계도면 및 실측조사후 시공시 중장비 하중 등을 고려한 시공계획 수립 필요

이한세 위원(수자원, 극동ENG)

〇 수리영향검토시 2차원해석을 실시, 1차원 해석결과와 비교분석하여 서울청 하천점용 협의시 증빙자료 활용 필요

〇 현재 진행중인 하천정비기본계획 자료 입수 후 중랑천과 한강 본류의 홍수량 및 홍수위를 추정, 현재 계획과 비교 검토 필요

도로시설계획팀장

〇 홍수위 여유고 확보를 위한 교량 단면 최적화 방안 검토

토목설계과장 - 대리참석

〇 지장물조사는 오차없이 정확히 하여 주시기 바람.

〇 기본설계단계에서 서울교통공사,  자전거정책과, 보행정책과 등 관계기관 협의 완료 요망

교량건설과장

〇 지반조사를 명확히 실시하고 보링지점 등 증빙자료 제출

〇 공사시행시 협의율 반영되지 않도록 현장조사, 지장물조사 등 명확히 실시

□ 조치 계획

〇 관련 자문의견에 대한 면밀한 검토 후 설계에 반영, 하천점용허가 및 각종 심의 추진 예정

□ 향후 일정

〇 ’20. 1. : 하천점용허가 및 건설기술심의(기본설계)

〇 ’20. 2. : 특정공법 심의

〇 ’20. 3. : 디자인 심의

〇 ’20. 4. : 빛공해 심의 및 자문회의(3차)

〇 ’20. 5. : 용역중간보고

〇 ’20. 6. : 설계안정성 검토(1,2종시설물)

〇 ’20. 7. : 용역최종보고, 계약심사

〇 ’20. 8. : 용역준공

붙 임 : 자문회의 자료(’19.12.6) 1부.  끝.