투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	반포 그늘숲 조성사업 설계변경 계약 의뢰

1. 생태공원과-3263(2019.12.04.)호와 관련입니다.

2. 울창한 한강숲 조성을 위하여 시행중인「2019년 반포 그늘숲 조성사업」과 관련하여 붙임과 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

▢ 사업개요

○ 공 사 명 : 2019년 반포 그늘숲 조성사업

○ 위    치 : 반포한강공원(세빛섬 인근)

○ 공사기간 : 2019. 09. 17 ~ 12. 15

○ 도 급 비 : 금492,590,900원

○ 도 급 자 : 상림조경 대표 서명현

▢ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급액	공급가액	***********	***********	************
	부가가치세	**********	**********	***********
	계	***********	***********	************

○ 예산과목 : 한강사업본부 생태환경과, 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강 자연성회복, 한강숲 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

							생태환경과장
주무관							김화시			생태환경과장					12/12 代장창수
협조자
시행			생태환경과-3359									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)															/
전화		3780-0630						/전송			3780-0745					/													/	부분공개(6)