투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(2차-최종)시행 및 변경계약의뢰[2019년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사-성동2구역]

1. 우리 사업소에서 시행하는「2019년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사(성동2구역)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차-최종)을 시행하고 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 포장도로정비구간 노면표시 유지보수공사-성동2구역

나. 공사기간 : 2019. 4. 2. ~ 12. 31.

다. 계약금액 : 증)23,701,250원

- 당 초 : *********************************

- 변 경 : ***************************

라. 도 급 자 : (주)산주건설 대표 이광희

마. 설계변경사유

- 포장구간 추가에 따른 공종별 물량 증감

바. 예산과목

(1) 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속시설물관리(도시개발),노후포장도로정비공사, 시설비(401-01)

(2) 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비(401-01)

붙임  1. 설계변경(1차)검토보고 1부.

2. 설계변경내역서(갑지포함) 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 감리 기술검토의견서 및 합의각서 1부.

5. 예산현황 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	구준서		도로보수과장	12/13 오재영
협조자
시행	도로보수과-6291	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	2210-1564	/전송	02)2210-1549	/	jjun97@seoul.go.kr	/	부분공개(5)