＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사변경계약 체결보고 (합정역~양화대교 북단간 송배수관 정비공사)

1. 급수운영과-21270(2019.11.29.)(설계변경 계약의뢰)호와 관련입니다.

2.『합정역~양화대교 북단간 송배수관 정비공사』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 보고합니다.

가. 계약건명 : 합정역~양화대교 북단간 송배수관 정비공사

나. 계약상대자 : ***************

************************

다. 변경사유 : 시공물량 증감 및 제경비등 실사용정산에 의한 변경

라. 금액변경내역                                             (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
도급액	공급가액	***********	***********	*************
	부가가치세	**********	**********	************
	계	***********	***********	*************

마. 설계변경내역                                                 (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	**********	**********	************	아스팔트포장절단 등
부설공	***********	***********	***********	강관부설(기계) 등
구조물공	**********	**********	***********	원형밸브실설치공(기초CON)공 등
부대공	**********	**********	************	콘테이너형 가설창고 등
사급자재비	**********	**********	************	1수곡관(700×45) 등
제비율	***********	***********	************	간접노무비 등
합계	***********	***********	*************	-

바. 추가계약보증금 : 해당없음

사. 추가도시철도채권 : 해당없음

붙임  1. 변경계약체결서류 1부.

2. 공사변경계약서 1부.

3. 변경의뢰공문(급수운영과-21270) 1부. 끝.

★주무관	구준모		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	代엄태현		서부수도사업소장	12/13 代김맹순
협조자
시행	행정지원과-27110	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02-3146-3551	/전송	02-3146-3578	/	20150123275@seoul.go.kr	/	부분공개(7)