문서번호	시설보수과-6904
결재일자	2019.12.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	12/13 代김광석
협조
	주무관		이석근

중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역 설계변경(정산)

2019. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역 설계변경(정산)

우리 센터에서 시행중인『중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역』 의 계약 물량 감소 등에 따른 설계변경(정산) 계약 보고임.

▣ 공사개요

○ 용 역 명 : 중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역

○ 도 급 자 : ㈜와콘엔지니어링  대표 이 용 표

○ 도 급 비 : 147,165,000원

○ 용역기간 : 2019. 9. 18. ~ 2019. 12. 31.

▣ 보고내용

○ 중랑천 좌안 일부 구간이 맨홀이 없거나 매몰되어 조사 불가한 구간 5개소 (8,571m)  발생으로 이에 따른 물량 감소

○ 자양노선(1,179m), 한강노선(691m), 행당노선(909m) 추가 조사 시행으로 물량 증가

○ 이로 인한 계약물량 증ㆍ감에 따른 설계변경(정산) 시행

○ 주요 설계변경 내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
차집관로 정밀조사	CCTV조사	km	1.00	0.84	감) 0.16
	CCTV+SONAR		16.00	10.86	감) 5,14
	SONAR		1.00	0.43	감) 0.57

○ 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		***********	***********	**************
도급비	공급가액	***********	***********	**************
	부가가치세	**********	**********	**************
	계	***********	**********	**************

▣ 조치의견

○ 상기 내용과 같이 설계변경(정산) 시행 후 최종 준공처리 하고자 합니다.

○ 예산비목 : 중랑물재생센터공통분야유지보수, 사업비용,영업비용, 처리비용, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.