문서번호	시설과-12638
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
김형식		송병욱	12/16 신용철
협조
	주무관		김기봉

「낙산배수지 건설공사」

송수관 구간 홍보비 계상 검토 보고

2019. 12.

상수도사업본부

시설안전부(시설과)

「낙산배수지 건설공사」

송수관 구간 홍보비 계상 검토 보고

송수관 부설구간은 협소한 주택가 이면도로의 여건으로 차량 우회 안내 등 민원 발생 최소화를 위헤 실시한 홍보비 계상에 대해 검토 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 2,300㎥(기존 3,300 ㎥ ⇒ 5,600㎥)
송배수관부설 400㎜, 연장 597m

❍ 기    간 : ’17. 12. 14.~’20. 05. 30.(총차)

’19. 01. 01.~’20. 12. 31.(3차수 진행 중)

❍ 도 급 비 : 2,095,899백만원(3차:971,025천원)

❍ 시 공 사 : ㈜엔씨종합건설 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제19-340호(’19. 12. 04.)

- 송수관로 공사 홍보비 반영 실정보고 제출

❍ 송수관로 구간별 홍보비 반영 필요

- 송수관 부설구간은 협소한 주택가 이면도로의 여건으로 지역 주민 민원 발생 최소화를 위해 공사정보, 차량 우회, 등의 정보 제공을 위한 가가호호 홍보 필요

❍ 구간별 공사 진행 상황에 따라 주민 홍보 시행

- 1~6구간은 구간별 1회 홍보(총 6회)

- 그 외 구간은 1~6구간보다 공사기간이 상대적으로 더 소요되고 부대 장비 투입이 많아 주민불편이 예상되어 공사 진행 상황에 따라 수시 홍보(총4회)

※ ’19. 2. 25. 주민설명회 개최 시 주민 가가호호 홍보 건의

❍ 구간별 주민 홍보 시행 현황

1구간 ~ 6구간

그 외 구간(암 구간)

❍ 공사비 증·감 현황[※ 신규단가는 낙찰률(86.8456％)적용]

(단위:원)

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증·감 (변경-당초)
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계						781,000		781,000
1.직접공사비						577,278		577,278
부대공
공사 홍보비	40가구 이하	회			2	64,142	2	64,142
공사 홍보비	40가구 이상	회			8	513,136	8	513,136
2. 제잡비						203,722		203,722

※ 산출 공사비 경비 적용

건설사업관리자 종합의견

❍ 주민 민원 발생 최소화를 위해 필요하나, 설계 시 누락된 송수관로 구간별 홍보비를 반영하여 향후 설계변경 시 반영함이 타당함.

검토의견(공사관리관)

❍ 협소한 주택가 이면도로 여건으로 차량 우회, 이동주차 안내 등을 위한 공사 홍보비 계상은 주민불편 최소화 및 민원발생 방지를 위해 필요한 발주기관이 설계서를 변경할 필요한 있다고 인정하는 경우로 공사계약 일반조건 제6절의 공사 설계 변경 사항에 해당

- 공사설계 변경사항은 계약금액 조정사유에 해당

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인하고 설계변경 등 후속 절차 이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 공문 1부.  끝.