문서번호	시설과-3201
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
강희진	代신상현	代하종식	12/16 代배기선
협 조
	재무팀장		곽선아

「서울숲 와이파이 설치」

설계변경 및 공사기한 연기검토

2019. 12.

동부공원녹지사업소

(시설과)

「서울숲 와이파이 설치」

설계변경 및 공사기한 연기검토

추진중인「서울숲 와이파이 설치」관련, 변경사항(신규공정) 발생으로 설계변경 및 공사기간을 연장하여, 동절기 지표면 동결에 의한 시공 품질저하를 예방하고 사업추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲 와이파이 설치

❍ 위    치 : 서울시 성동구 뚝섬로 273

❍ 규    모 : AP 14개, 광케이블 1918m

❍ 계 약 자 : *************

❍ 계약금액 : ****************************************

❍ 공사기간 : *****************************

□ 검토내용

❍ 현장 실정사항(명신‘1912-01( ‘19.12.11), 명신‘1912-01( ‘19.12.11))

구분	변경 사유	검토내용
서울숲 ↕ 서울시 청연결	- 서울숲 와이파이 외부 접속점이 당초 서울숲 주차장이었으나 - 성동구청(정보통신과)와 협의결과 성수고교 앞 유수지로 변경	성동구와 협의 결과에 따라 와이파이 외부접속점을 변경시공

□ 예산검토

❍ 공사비 변경 내역(개략금액)

구 분		금 액(원)		증 / 감 (원)		비 고
		당 초	변 경
총공사비		***********	***********	*	**********
도급비	공급가액	**********	**********	*	**********
	부가세	*********	*********	*	*********
	계	**********	**********	*	**********
관급자재비		**********	**********	*	*
도로굴착비		*******	*******	*	*

❍ 예산내역

구 분	예산재배정액 (a)	도급비 (b)	관급비 (c)	도로굴착비 (d)	낙찰 및 집행잔액 [a-(b+c+d)]
금액	***********	**********	**********	*******	**********

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소시설과, 공원녹지정책개발및만족

도개선, 공원이용서비스만족도향상, 공원유지관리및

이용활성화, 우리동네시공원가꾸기(시민참여), 시설

비및부대비, 시설비(예산편성부서:푸른도시국공원녹

지정책과)

□ 처리의견

❍ 설계변경

- 통화품질, 향후 확장성 위해 서울숲↔서울시 광선로 접속점 변경

- 상기 현장 변경사항 반영내역으로 계약부서에 설계변경 의뢰

- 도급비 증액분은 집행잔액 및 낙찰차액을 활용.

❍ 공기연장

- 연기사유 : 접속위치 변경에 따른 기존선로 점검 및 작업 준비 등에 시간이 소요되어 공사일정 조정

- 준공기한 변경 : 2019.12.20. ⇒ 2020. 2. 28.

붙임  1. 시공사 공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.  끝.