문서번호	정수시설과-12036
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박진이		유영춘	12/16 가길현
협조

-태양광 발전설비 설치 전기공사- 설계변경 검토 보고

｢2019년 영등포아리수정수센터 태양광 발전설비 설치｣

전기공사 설계변경 보고

2019. 12.

영등포아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

｢2019년 영등포아리수정수센터 태양광발전설비 설치｣

전기공사 설계변경 보고

우리센터 태양광발전설비 설치 전기공사 시행 중 설계변경 사항이 발생하여 변경 시행코자 보고합니다.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 태양광발전설비 설치 전기공사

○ 도 급 자 : ㈜로터스전력 대표 전우식

○ 계약금액 : 금43,672,580원

○ 공사기간 : ’19.11.01.~’19.12.23.

○ 변경내용 : 붙임 “설계변경내역서” 참조

○ 관련근거

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제39호)

· 제1장제8절(보험료 사후정산 등)

· 제13장제6절(공사설계의 변경)

▢ 설계변경 사항

○ 공사비 변경 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 가	비 고
전기공사	43,672,580	51,740,000	8,067,420	·낙찰차액사용

※ ｢태양광발전설비 설치 전기공사｣낙찰차액 사용계획(정수시설과-12002(2019.12.13.)호

○ 물량 및 제경비 변경

‣ 물량

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

‣ 제경비

**************************************************************

****************************************************************

*************************************************** ****************************

▢ 조치계획

○ 변경된 설계내용에 따라 본부 안전총괄과에 계약심사 의뢰 후 결과를 반영하여 변경계약을 처리코자 함

붙 임 : 설계변경내역서 1부.  끝.