투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	2019년 서울대공원 수유실 조성공사 준공정산 시행

1. 시설과-9227호(2019.12.16.)와 관련입니다.

2. 2019년 서울대공원 수유실 조성공사 관련 제경비 정산 사항에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행 하고자 하니 변경 계약하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 서울대공원 수유실 조성공사

나. 계약금액 : 금114,365,710원

다. 계약기간 : 2019. 11. 14. ~ 2020. 01. 02.

라. 계 약 자 : 부자조경 주식회사 대표 강동준

마. 계약금액 변경

	변 경 전	변 경 후	비 고
금 액	114,365,710원	107,920,000원	감) 6,445,710원

바. 설계변경 사유 : 제경비 정산

사. 공사기간 : 변경없음

붙임 : 1) 2019년 서울대공원 수유실 조성공사 준공정산 보고 1부.

2) 정산 내역서 1부, 준공정산 검증확인서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	류훈		주무관	배진수		시설과장	12/16 양희상
협조자	주무관	김학석
시행	시설과-9229	(		)	접수		(		)
우			/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(5)