투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역)

우리 사업소에서 시행중인 『일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 일원터널정밀안전진단 외 1개소 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2019.3.26 ~ 2019.12.24.

다. 도 급 자 : (사)대한산업안전협회 대표 윤양배 외 1

라. 도 급 비 : 금179,340,000원(금일억칠천구백삼십사만원)

마.  예산과목

- 서울시 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검 및 진단, 시설비 및 부대비, 시설비            ‣ 당초 : 금179,340,000원, 변경 : 금167,009,250원

- 성남시 : 세입세출 외 현금

‣ 당초 : 0원, 변경 : 금11,080,750원

바. 설계변경 내역

도급비 : 178,090,000원 (감 1,250,000원 )

(단위 : 원)

구 분		용 역 비				비 고
		당 초	변 경
			계	서울시	성남시
총용역비		179,340,000	178,090,000	167,009,250	11,080,750
도급비	공급가액	160,990,909	160,990,909	150,974,063	10,016,846
	부가세	16,099,091	16,099,091	15,097,407	1,001,684
	자문비	2,250,000	1,000,000	937,780	62,220
	계	179,340,000	178,090,000	167,009,250	11,080,750

사. 설계변경 사유

- 자문위원 자문비 정산(금2,250,000원→금1,000,000원)

- 위례터널 분담금 구분(서울시 65%, 성남시 35%)

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.  끝.

주무관	김종범		시설보수과장	임영철		동부도로사업소장	12/16 송만규
협조자
시행	시설보수과-7836	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0370	/전송	2040-0308	/	kjb61@seoul.go.kr	/	대시민공개