문서번호	기전설비과-12235
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
임은비		조성태	12/16 代서한호
협 조
	기획예산과장			박재희
	재무회계과장			代서미희
	주무관			김기봉

- 낙산배수지 건설공사 (전기공사) -

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

2019. 12.

생   산   부

【기전설비과】

- 낙산배수지 건설공사 (전기공사) -

설계변경 및 준공기한 연기 검토보고

낙산배주시 건설공사(전기공사 2차분)과 관련 감리단에서 설계변경 및 준공기한 연기요청이 접수되어 아래와 같이 검토결과를 보고함.

Ⅰ				관 련 근 거

❍ 설계변경 서류 제출 : 한국종합2019-12-627호

❍ 준공기한연기 서류 제출 : 낙산및수유6배수(감리)제19-355호

Ⅱ				사 업 개 요

❍ 공 사 명 : 낙산배수지 건설공사(전기공사)

❍ 공사개요 : 배수지 증설공사(증2,300㎥)에 따른 부대 전기설비 공사

❍ 시공업체 : 주식회사 우주전력(대표 정윤주)

❍ 감리회사 : 한국종합기술(책임건설사업관리기술자 최형출, 전기 전유택)

❍ 공사기간 및 계약금액

구 분	공사기간	계약금액
총차분	‘19.06.06.~’20.05.30.	131,770,660원
2차분	‘19.01.01.~’19.12.31.	98,422,500원

Ⅲ				설계변경 보고

❍ 계약금액 변경

구 분	공 사 비		증·감
	당 초	변 경
총차분	131,770,600	148,800,000	증)17,029,400
2차분	98,422,500	114,640,000	증)16,217,500

- 계약심사 결과반영 : 검토서 첨부(붙임5)

- 계약금액조정검증시스템 : 제비율검증완료(붙임6)

❍ 설계변경 주요내용

공 종	변경내용	비 고
가, 동력 설비공사	1) 한전계량기함 추가설치	관련문서 : 중부수도-27528호(‘19.10.29)
나. 전등전열 설비공사	1) 옥외보안등 케이블 규격변경
다. CCTV 설비공사	1) CCTV의 전원 및 영상용 전선관 및 케이블 변경
라. 계측제어 설비공사	1) 밸브 개도 확인용 케이블 추가 2) 수위전광판 및 오뚜기 스위치 추가 3) 출입감시장치 추가

※ 낙산배수지 건설공사(전기공사) 실정보고 검토(기전설비과-11605호 ‘19.11.27)

❍ 계약기간 변경

- 당  초 : ‘19.01.01,~’19.12.31.

- 2   차 : ‘19.01.01,~’20.03.31.

Ⅳ				검토결과 및 행정사항

❍ 상기 보고 내용과 같이 물량변경 및 보험료 계상 등으로 총차분 17백만원, 증액하여 계약금액 변경하고, 2020.03.31.일자로 준공기한을 연기코자 함.

❍ 재무회계과에 계약 변경요청하고 감리업체에 변경사항 통보

붙임 1) 전기공사 설계변경 요청(감리단) 1부.

2) 전기공사 준공기한 연기요청(감리단) 1부.

3) 합의서 1부

4) 설계변경내역서(총차분, 2차분) 1식

5) 제비율 검증결과(총차분, 2차분) 1식.

6) 계약심사 검토서 1식.  끝.