문서번호	설비부-20802
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
최대진	여인웅	12/16 임정규

『탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사』

1차공사 준공 정산 검토 보고

2019.12.

도시기반시설본부

(설비부)

『탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사』

1차공사 준공 정산 검토 보고

「탄천물재생센터 3차총인처리시설 기계설비공사」와 관련하여 1차공사 준공에 따른 보험료 등 정산 내용을 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

위    치 : 서울시 강남구 개포로 625(탄천물재생센터 내)

공사기간 : 2017. 12. 4 ~ 2020. 12. 31.(1차 ’17. 12. 4 ~ ’19. 12. 31)

규  모 : 총인처리시설 2개소 처리량 Q=450,000㎥/일

○ 1·2처리장 총인유입 및 처리설비, 농축설비, 용수공급설비, 탈취설비, 반류수이송설비 각 1식

시 공 사 : ㈜이수에이치앤씨/(주)임하엔지니어링/금수티아이(주)

감리용역 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

계약현황

구 분	계약금액	공사금액	비 고
총 차	1,837,280,000	‘17’12.04~‘20.12.31
1 차	363,717,810	‘17.12.04~’19.12.31	금회준공
2 차	1,473,562,190	‘19.12.12~’20.12.21

Ⅱ		관 련 근 거

기계설비공사(1차) 준공검사 결과 보고

- 탄천하감 2019-442호(2019.12.16.)

Ⅲ		검토내용

1차공사 준공검사

○ 준 공 일 : 2019. 12. 12(목)

○ 검 사 일 : 2019. 12. 13(금)

○ 준공검사자/입회자 : 유신 기술지원기술자 여두현 외 1, 현장대리인 외 2

○ 정산금액

구 분	계약금액	준공정산금액	증감액	비 고
기계설비공사(1차)	363,717,810	352,550,070	감) 11,167,740

세부 정산항목

○ 정산내용 : 건강, 연금, 노인장기, 산업안전보건관리비, 환경보전비 정산

○ 정산금액 : 붙임 준공정산 내역 등 참조

<기계공사 1차>                                            (단위 :원)

구 분		계약금액	정산금액	비고
순 공 사 원 가 (경비)	국민건강보험료	1,918,899	962,190	감) 956,709
	국민연금보험료	2,810,623	1,515,140	감) 1,295,483
	노인장기요양보험료	125,687	70,940	감) 54,747
	퇴직공제부금비	2,596,158	2,596,158	-
	산업안전보건관리비	7,241,694	2,081,800	감) 5,159,894
	환경보전비	1,186,559	-	감) 1,186,559
	소 계	15,879,620	7,226,228	감) 8,653,392
일반관리비, 이윤, 부가세		76,349,069	73,834,721	감) 2,514,348
합 계		92,228,689	81,060,949	감) 11,167,740

건설사업관리기술자 의견

○ 건강보험료 등 사후정산항목의 조정금액과 제경비 정산금액을 검토한 결과 관련 규정에 적합하게 정산된 것으로 판단되며 준공부분 내역이 설계도서대로 시공되었음

Ⅳ		조 치 계 획

건설사업관리단 보고사항을 검토한 결과 관련 규정에 의거하여 보험료 등 준공 정산결과에 따라 공사금액 조정(감 11,167,740원)이 타당하므로 1차공사 완료에 다른 준공금 지급시 정산분을 감액하여 지급(준공) 처리하고자 함

붙임 : 1차분 준공검사 결과 보고 및 정산합의각서 각 1부.  끝.