문서번호	투자창업과-13134
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	창업기반조성팀장	투자창업과장
노은영	백명숙	12/16 최판규

2019년 서울창업카페 상봉점 인테리어공사 설계변경 보고

2019. 12

경제정책실

(투자창업과)

2019년 서울창업카페 상봉점 조성 인테리어공사 설계변경 보고

서울창업카페 상봉점 조성 인테리어공사와 관련 현장여건 변경에 따른 신규공종 추가 및 시공물량 변경으로 설계 변경하고자 함

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 2019년 서울창업카페 상봉점 조성 인테리어공사

○ 위치/규모 : 중랑구 봉우재로 93-5 지상2층, 3층 일부영역 /171.25㎡

○ 계약금액 : ************************************

○ 계 약 자 : *********************

○ 계약기간 : 2019. 11. 11.~2019. 12. 20.

○ 공사내용 : 철거, 가설, 가구공사 및 냉방기기 설치 등 건축·기계설비공사

□ 정산내역

○ 설계금액 조정

구분		공사금액	증·감금액		증·감 사유
도급비 (준공금액)	***	************	증*	20,075,200	가구 및 간판 변경설치 및 위생기구설치 등 신규물량 추가 발생
	****	************

○ 주요 설계변경 사유

- 가구 및 간판 변경설치에 따른 증액

- 공사구간 변경(화장실 및 복도추가)에 따른 위생기구설치 및 칠공사 추가

- 현장여건에 따른 마감재 변경 등

- 건강보험료, 연금보험료, 요양보험료 등 제경비 감소 발생분 반영 등

□ 향후계획

○ ’19.12.16 : 설계변경 계약 의뢰

○ ’19.12.20 : 공사준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 변경계약 합의각서 1부.  끝.