문서번호	전시과-9347
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	12/16 代김호식
협조

「서울시립과학관 천체관측실 구축 공사」

준 공 검 사   결 과 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 12.

서울시립과학관

(전  시  과)

「서울시립과학관 천체관측실 구축 공사」

준 공 검 사  결 과 보 고

「서울시립과학관 천체관측실 구축 공사」가 완료됨에 따라 준공검사를 실시하고, 그 결과를 보고드림

1		관 련 근 거

□「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제14장 용역계약 일반조건

❍ 제8절 용역의 완성과 대가지급(1. 용역 완성의 검사)

□ 준공검수 요청의 건(BS-*******05호)

2		사 업 개 요

□ 계 약 명 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사

□ 위    치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 160(서울시립과학관 내)

□ 계약기간 : 2019.09.09. ~ 2019.12.07.

□ 계약금액 : 금221,872,160원정(금이억이천일백팔십칠만이천일백육십원정)

□ 계약업체 : 백산토건㈜(*********

□ 주요내용 : 천체관측실 증축 관련 공사 (면적 45.61m2)

3		추 진 경 위

□ `19.04.13.         : 천체관측실 확충 종합계획 수립

□ `19.04.25.         :「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」 추진

□ `19.04.25.         : 기술타당성심사요청(천체관측실 구축설계용역)

□ `19.04.30.         :「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」 계약의뢰

□ `19.05.08.         :「천체관측장비 및 관측시스템 구축」 계약의뢰

□ `19.05.22.         :「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」실정보고

□ `19.05.27.         :「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」계약변경 의뢰

□ `19.07.25.          :「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」 최종                              보고회 실시

□ `19.07.30.          :「서울시립과학관 천체관측실 구축 설계용역」 준공

□ `19.08.13.          :「천체관측장비 및 관측시스템 구축」제안서접

재공고 유찰 → 수의계약 추진

□ `19.08.19.          :「천체관측장비 및 관측시스템 구축」제안평가                          개최(협상적격)

□ `19.08.19.          :「서울시립과학관 천체관측실 구축공사」계약의뢰

□ `19.08.22.          :「천체관측장비 및 관측시스템 구축」계약의뢰

□ `19.10.16.          :「서울시립과학관 천체관측실 구축공사」낙찰차액 및 집행잔액 사용계획 보고

□ `19.10.18.          :「서울시립과학관 천체관측실 구축공사 감리용역」추진계획

□ `19.10.18.          : 기술타당성심사요청 「서울시립과학관 천체관측실 구축공사 감리용역」

□ `19.10.20.          :「서울시립과학관 천체관측실 전기통신 공사」추진계획

□ `19.10.21.          :「서울시립과학관 천체관측실 구축공사 감리용역」계약 의뢰

□ `19.10.30.          :「서울시립과학관 천체관측실 전기통신 공사」계약의뢰

□ `19.11.20.          :「서울시립과학관 천체관측실 소방공사」추진계획

□ `19.11.20.          :「서울시립과학관 천체관측실 소방공사」계약의뢰

□ `19.11.25.          :「서울시립과학관 천체관측실 구축공사」낙찰차액 및 집행잔액 사용계획 보고

□ `19.11.28.          :「서울시립과학관 천체관측실 공사 소방감리용역」추진계획

□ `19.11.28.          :「서울시립과학관 천체관측실 공사 소방감리용역」계약의뢰

□ `19.12.07.         :「서울시립과학관 천체관측실 구축공사」 용역 준공

□ `19.12.07.         :「서울시립과학관 천체관측실 전기통신 공사」 용역 준공

4		준공검사 내용

□ 사  업  명 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사 및 서울시립과학관 천체관측실 전기통신공사 용역

□ 과업준공일 : 2019.12.07.(토)

□ 준공검사일 : 2019.12.16.(월)

□ 계 약 금 액

❍ 천체관측실 구축 공사

- 계약금액 : 금221,872,160원정(금이억이천일백팔십칠만이천일백육십원정)

- 선 급 금 : 금111,551,420원(금일억일천일백오십오만이천사백이십원정)

※ 계약금의 50% 지급

❍ 잔  금 : 금111,551,420원(금일억일천일백오십오만이천사백이십원정)

❍ 천체관측실 전기통신 공사

- 계약금액 : 금13,083,000원정(금일천삼백팔만삼천원정)

□ 준공검사자 : 서울시립과학관 전시과장, 이진원, 신지혜 주무관(총 3명)

※ 계약상대자 측 각회사별 (백산토건 및 태산전력) 직원 1명 입회

□ 준공검사 결과보고

❍ 준공검사 일정에 따라 준공검사를 실시한 결과 설계도면 및 시방대로 시공완료 되었기에 준공처리 가능함(공정율 : 100%)

❍ 산출물(시설 및 콘텐츠)은 기획, 설계도면, 시방 및 내역과 현장 설치상태 확인결과 도서대로 시공완료 및 작동하며, 준공청소 실시하였음

5		처 리 방 안

□「서울시립과학관 천체관측실 구축공사」 및 「서울시립과학관 천체관측실 전기통신 공사」의 준공검사를 완료함에 따라 본 과업을 준공처리

□ 준공금 지급시 선금 지급분에 대한 정산을 완료하고, 선금 지급분을 제외한 잔액을 지급 할 수 있도록 조치

□ 준공 후 지속적인 잔손보기 시행예정이며, 시정보완 조치가 필요한 사항이 발생되면 즉각 조치

붙임   1. 준공사진 대지(별도 첨부) 1부.  끝.