문서번호	시설관리과-24791
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김재현		정진호	12/16 代김남구
협 조

기성보고(3차)

「2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

2019. 12.

강서수도사업소

〔시설관리과〕

기성보고(3차)

「2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

우리 사업소에서 시행 중인「2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)」에 대한 기성 검토 결과를 보고 드림.

Ⅰ	사업개요

○ 사 업 명: 2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 사업규모: 아리수올림터·배수지 등 전기설비 사전 정비, 긴급보수 등

○ 사업기간: 2019. 04. 01. ~ 2020. 03. 31.

○ 총부기금액 : ************

- 1차수 : ************(2019년도분)

- 2차수 : ************(2020년도분)

○ 계  약  자 :  **************

○ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비(아리수올림터,배수지 기전설비 유지보수)

Ⅱ	기성 신청내역

○ 기    간 : 2019. 09. 30. ~ 2019. 12. 20.

○ 규    모 : 전기 및 통신 입입용 폴(Pole)대 설치, 누전차단기(ELB) 교체 등

○ 위    치 : 신정가압장 등 14개소

○ 기성금액 : ***********

○ 기성내역

(단위 : 원)

총부기금액	전회까지 기성금액	금회(2차) 기성금액	지급금액 (누 계)	잔여금액	비 고
**********	**********	*********	**********	**********	-

○ 세부내역

공 종		규 격	단 위	수 량	비 고
작업지시 7차(‘19.9.30) - 신정올림터 외 3개소 전기공사 및 배관 철거
1	강관전주 건주	8m이하, 근가1본 포함, 터파기되메우기 포함	본	1
2	압착터미널 설치	16sq, 3C, 긴급활선작업	개	2
3	CABLE 철거	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	17
4	접지선 철거	0.6/1kV F-GV 4㎟ (전선관)	m	17
5	강제전선관_옥내 철거	아연도28mm	m	17
6	입상케이블 보호관 설치	D50mm	식	2
작업지시 8차(‘19.12.2) - KSM2 유량계 전송반 누전차단기 교체 등
7	Floatless switch 설치	고감도형	개	2
8	누전차단기 철거 및 설치	2P, 30AF이하, 30A	개	9

Ⅲ	기성 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토             : 이상 없음

○ 관급 및 사급 자재정산 수량 확인결과 : 이상 없음

○ 공사현장 및 주변정리 상태 확인결과  : 이상 없음

○ 기타 사항                           : 이상 없음

Ⅳ	행정사항

○ 위 검토결과에 의거「2019년 가압장 및 배수지 등 전기설비 유지보수공사(연간단가)」기성 시행

붙 임 : 1. 기성내역서 1부

2. 작업완료보고서 1부.  끝.