문서번호	도로보수과-10024
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
박해웅		양기승	12/16 송만규
협조
	주무관		이석연

2019년 굴착복구 설계변경 검토 보고(최종)

[하반기 굴착복구공사, 폐아스콘처리용역, 노면표시공사]

2019.12.16.

동부도로사업소

(도로보수과)

2019년 굴착복구 설계변경 검토 보고(최종)

[하반기 굴착복구공사, 폐아스콘처리용역, 노면표시공사]

우리 사업소에서 시행중인 『2019년 하반기 포장도로 굴착복구공사, 폐아스콘처리용역, 노면표시도색공사』와 관련, 시공물량 증·감 등 현장여건 반영에 따른 설계변경(제1회,최종)에 대해 검토결과를 보고드림.

	1		추진현황

○ 도로관리과-3018(’19.02.21.) : 굴착복구기금 재배정(제1차-4,215백만원)

○ 도로관리과-9835(’19.06.20.) : 굴착복구기금 재배정(제2차-4,921백만원)

○ 도로관리과-14927(’19.09.20.) : 굴착복구기금 재배정(제3차-298백만원)

○ 재무과-16344(’19.03.28.) : 굴착복구 노면표시 도색공사 계약체결 통보

○ 재무과-16487(’19.03.29.) : 굴착복구 폐아스콘처리용역 계약체결 통보

○ 재무과-39702(’19.07.30.) : 하반기 굴착복구공사 계약체결 통보

○ 토목관리처-1061호(’19.12.13.) : 설계변경(1차) 검토 보고(하반기굴착복구공사)

○ 토목관리처-1068호(’19.12.13.) : 설계변경(1차) 검토 보고(폐아스콘처리용역)

○ TR-원-1204호(’19.12.16.) : 설계변경(1차) 검토 보고(노면표시도색공사)

	2		공사(용역) 개요

공사(용역)명	공사기간	공사개요	공 사 비	계약상대자
2019 하반기 굴착복구공사	2019. 8.26. ~2009.12.26.	굴착복구(t=80㎝) 125a 차로복구(t=5㎝) 504a	******** *********************	******** *******
2019 굴착및시행도로 노면표시 도색공사	2019. 3.27 ~2019.12.26.	차선도색 93,081m 차선제거 100m	****** *******************	*******
2019굴착및시행도로 폐아스콘처리 용역	2019. 3.28. ~2019.12.26.	폐아스콘처리 13,172톤	****** *****************	****** ******

	3		보고내용

○ 도로점용(굴착복구)허가 물량과 노면표시·폐아스콘처리 물량 증·감 등을 반영, 재배정된 예산범위 내에서 기 계약된 공종의 물량을 아래와 같이 조정(증/감)하는 사항임

- 공사(용역)별 수량변경 현황

공사(용역)	공 종	수 량			금액변경 (천원)
		당초	변경	증․감
하반기 굴착복구공사	굴착복구(t=80cm)	125.0a	220.6a	증) 95.6a	증) 966,632
	표층확폭복구(t=5cm)	8.0a	23.2a	증) 15.2a	증) 62,952
	차로단위복구(t=5cm)	504.0a	699.4a	증) 195.4a	증) 92,937
	소계				증) 1,122,251
노면표시 도색공사	차선도색(백색,황색 외)	93,081m	82,320m	감) 10,761m	증) 4,798
	차선제거	100m	4,662m	증) 4,562m	증) 21,569
	도로표지병 설치 및 철거	987개	46개	감) 941개	감) 9,258
	교통신호수	300인	114인	감) 186인	감) 20,422
	소계				감) 3,312
폐아스콘 처리용역	폐아스콘 운반 및 처리	13,172톤	14,270톤	증) 1,098톤	증) 21,482

- 물량증·감 주요 사유

공사(용역)	주요 사유
하반기 굴착복구공사	① 문래동 혼탁수 발생 관련 노후상수관 긴급정비(구천면로, 삼성로, 송파대로, 학동로, 등)로 인한 물량 증 ② 논현로 하수관로 신설 및 영동대로 상수도 공사 중복굴착에 따른 물량 증 ③ 개포시영 및 개포1단지 재건축 관련 상수·통신·난방 인입공사 시행으로 인한 물량 증 ④ 각종 보험료 및 환경보전비, 안전관리비 정산에 따른 금액 감소(113,305천원) ⑤ 재포장 예정구간(재건축공사 등) 재생아스콘 사용량 확대로 예산절감(86백만원) - 언주로, 양재대로, 학동로, 삼성로, 도곡로, 역삼로, 영동대로(A=294a)
노면표시 도색공사	① 교통개선사업 등 타 공사에서 노면표시공사 시행에 따른 물량 감(오금로, 삼성로) ② 지장물과다 등 사유로 굴착공사 연기구간 노면표시 미시행(도곡로, 역삼로, 상일로 등)
폐아스콘 처리용역	① 차로단위복구 및 표층확폭복구 물량 증가에 따른 폐아스콘 발생량 증가

○ 공사(용역)별 설계변경 현황

(단위:원)

공사(용역)명	구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증, 감	비고
2019년 하반기 굴착복구공사	계	*************	*************	***************
	도 급 비	*************	*************	****************
	관급자재비	**************	*************	***************
	이 설 비	**********	*	***************
2019년 굴착및시행도로 노면표시 도색공사	계	***********	***********	*************
	도 급 비	***********	***********	************
	관급자재비	**********	**********	************
	이 설 비	*	*	*****
2019년 굴착및시행도로 폐아스콘 처리용역	계	***********	***********	*************
	도 급 비	***********	***********	*************
	관급자재비	*	*	*****
	이 설 비	*	*	*****

	4		조치계획

○ 설계변경 시행

- 건설사업관리자로부터 보고된 설계변경 내용을 검토한 바, 설계변경의 내용 등이 적정하다고 판단되므로 설계변경 및 재계약 시행코자 함.

○ 공사(용역) 준공 계획

(금액:원)

공사(용역)명	계약(예정)액	기정산액	금회정산액	누계금액	잔 액
2019년 하반기 굴착복구공사	*************	**	*************	*************	**
2019년 굴착및시행도로 노면표시 도색공사	***********	**	***********	***********	**
2019년 굴착및시행도로 폐아스콘 처리용역	***********	**	***********	***********	**

※ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비및부대비, 시설비

○ 불량맨홀 정비 시행

- 차로단위복구로 인해 포장면과 높이차가 발생된 맨홀은 굴착복구기금을 활용하여 ‘불량맨홀 정비공사(연간단가)’에 포함 시행하여 정비하고

- 맨홀정비 비용은 도로점용(굴착,복구)허가 준공 시 사후정산 시행하여 도로복구원인자부담금으로 징수

- 정비물량 : *******************************

- 소요예산 : **********************

***********************************************

붙 임 1. 건설사업관리자 검토의견 각 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.

3. 2019년 하반기 굴착복구공사 집계표(증감내역) 1부.

4. 2019년 굴착복구공사 위치도 1부.

6. 도로법 및 맨홀정비지침 발췌 1부.  끝.