투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰(중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역)

1. 우리 센터에서 시행 중인 『중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역』에 대하여 다음과 같이 설계변경(정산) 및 변경계약을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 중랑천 좌안 차집관로 정밀조사 용역

나. 도 급 자 : ㈜와콘엔지니어링  대표 이 용 표

다. 도 급 비 : 147,165,000원

라. 용역기간 : 2019. 9. 18. ~ 2019. 12. 31.

마. 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		***********	***********	**************
도급비	공급가액	***********	***********	**************
	부가가치세	**********	**********	**************
	계	***********	**********	**************

바. 설계변경 사유 : 차집관로 정밀조사 물량감소 당초 18,000m, 변경 12,130m

사. 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비

수선유지교체비, 수선유지비.

따로붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 설계변경 사유서 1부

3) 변경내역서 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	김원선		주무관	조연상		시설보수과장	12/16 임준빈
협조자
시행	시설보수과-6932	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 본관 3층 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2211-2574	/전송	02)2211-2579	/	kws325@seoul.go.kr	/	부분공개(7)