문서번호	하천관리과-18274
결재일자	2019.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
실무사무관	하천계획팀장	하천관리과장
이승준	代이승준	12/16 代박홍봉

(시민참여)하천생태 모니터링 용역

과업내용 조정 및 준공기한 연기 검토보고

2019.12.

하천관리과

(하천계획팀)

(시민참여)하천생태 모니터링 용역

과업내용 조정 및 준공기한 연기 검토보고

시민참여 예산으로 추진중인 하천관리 모니터링 용역의 효율적 수행을 위하여 과업내용을 조정하고 과업 수행을 위해 준공기한 연기 및 설계 세부내역을 조정하고자 함

□ 용역개요

❍ 계약건명: 하천관리 모니터링

❍ 계약업체: 서울하천네트워크

❍ 계약기간: 2019.5.23.~2019.12.20

❍ 계약금액: 금팔천칠백일십일만오천원(₩87,115,000)

□ 추진경위

○ ‘19. 5.23    용역 계약

○ ‘19. 6~11.   과업수행

○ ‘19.12. 6    용역 중간보고

□ 주요 변경내용

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약금액	87,115,000원		설계내역 조정
계약기간	’19.5.23.~’19.12.20	’19.5.23~’20.4.20	4개월 연장
과업내용 (변경사항 중심)	설문 및 생태지도 작성	ㆍ1월~4월 생태조사 추가 ㆍ시민참여 모니터링 조사틀 마련 및 시범운영 ※ 기타 중복내용 항목 조정	내용조정

❍ 계약기간 변경

- 계약기한 연장사유

ㆍ당초 용역계약 시 봄철(1~4월) 생태현황조사가 포함되어 있지 않았는 바, 과업기간 연기를 통해 봄철 생태현황조사를 시행하고,

ㆍ과업내용 조정에 따른 전문가 자문 및 하천생태관련 시민단체 의견수렴 등을 위한 준비기간이 필요하여 용역 준공기한을 연기코자 함

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 : 미부과

❍ 과업내용 조정

- 당초 용역계약 시 포함되어 있던 ‘설문 및 생태지도 작성’을 삭제하고 ‘시민참여 모니터링 조사틀 마련’ 등을 포함한 사항으로,

- 그간 하천관련 시민단체에서 조사하여 누적된 하천생태현황을 자료화 하고 표준회된 시민참여 모니터링 조사틀을 마련함으로써 시민참여를 통한 하천관리 체계의 기반을 마련하기 위해 해당 사항을 수행토록 과업내용을 조정코자 함

❍ 설계내역 조정

- 계약금액의 변경은 없으나, 과업내용 조정에 따른 설계 세부내역(경비 항목) 조정이 필요하여 이를 반영코자 함

□ 향후계획

○ ‘19. 12.	: 용역 변경계약 의뢰(재무과)

○ ‘20. 4.	: 용역 준공

붙임	1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 합의각서 1부.  끝.

3. 과업내용서 및 설계내역서 각 1부(당초/변경). 끝.