투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1회 설계변경) 지출품의

1. 예산과목 : 도시기반시설본부 토목부, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 개봉철도고가 바닥판 교체 정비공사, 시설비및부대비, 감리비 (예산편성부서 : 안전총괄실 교량안전과)

2. 용역명 : 개봉고가 성능개선공사 외 1개소 감독권한대행 등 건설사업관리용역(1회 설계변경) 지출품의

가. 용역비

- 전체(1회) : 당초 2,574,322천원 / 변경 4,515,390천원 (증 1,941,068천원)

- 1차 1회 : 당초 264,670천원 / 변경 450,000천원 (증 185,030천원)

나. 용역기간

- 전체(1회) : 2019.6.17.~2023.7.16. (변경없음)

- 1차(1회) : 당초 2019.6.17.~2019.12.28. / 변경 2019.6.17.~2020.2.16.(증 1.54개월).  끝.

주무관							김동수			터널건설과장					여용석					토목부장					12/16 김용제
협조자
시행			토목부-23388									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2567						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개