문서번호	정수과-14107
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		하은경	12/16 유성종
협조

- 2019년도 정수처리시설 청소용역 -

추진결과 및 설계변경 검토 보고

2019. 12.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

- 2019년도 정수처리시설 청소용역 -

추진결과 및 설계변경 검토 보고

‘19년도 정수처리시설 청소 및 준설용역 추진 결과 및 설계변경(정산) 사항에 대한 검토결과를 보고드림.

Ⅰ		사 업 개 요

⃞ 용 역 명 : 2019년 정수처리시설 청소 및 준설용역

⃞ 용역기간 : 2019.03.25. ~ 2019.12.24.

⃞ 용 역 비 : 금249,907,000원

⃞ 용역업체 : ㈜태완씨엔씨 [대표 - 김형국, 소재지 - 서울시 영등포구]

⃞ 계약물량 : 정수지 52,522㎡, 침전지 등 주벽 308,276㎡ 등

Ⅱ		추 진 결 과

⃞ 총괄 추진결과

○ 시설물별 청소대상 및 결과

- 슬러지수집기 수리 등 응집･침전지 정비를 위한 추가 청소로 청소물량 증가

- 여과지, 오니처리장 공사 등 공정관리의 사유로 일부 시설 청소물량 감소

시설물 명칭	대상	계약물량		추진실적		비고
		지수	물량(㎡)	지수	물량(㎡)
합 계			360,798		380,780	(증) 19,982㎡
응집․침전지	40지	66지	238,764	69지	263,851	(증) 25,087㎡
여 과 지	80지	160지	29,376	144지	26,720	(감) 2,656㎡
정 수 지	6지	6지	52,522	6지	52,522	0㎡
농 축 조	4지	8지	4,040	8지	4,040	0㎡
회 수 조	2지	2지	468	2지	468	0㎡
배슬러지지	4지	2지	1,207	-	-	(감) 1,207㎡
활성탄흡착지	44지	44지	18,216	41지	16,974	(감) 1,242㎡
기 타	-	-	16,205	-	16,205	0㎡

⃞ 시설별 세부 추진결과

○ 총괄 실적

구분	침전지						여과지						정수지		활성탄지			1차농축조		회수조	배슬러지	비고
	계	#1				#2	계	#1				#2	#1	#2	#1	#2	통로	#1	#2	#1	#1
		1 계열	2 계열	3 계열	4 계열			1 계열	2 계열	3 계열	4 계열
진행률	115.0%						90.0%						100%		93.2%			100%		100%	0%
대상	40	8	8	8	8	8		16	16	16	16	16	4	2	22	22	2	2	2	2	2
계획	48					12	160	128				32	4	2	22	22	2	4	4	2	2
실적	69	14	14	15	14	12	144	32	32	32	32	16	4	2	19	22	2	4	4	2	-

○ 응집․침전지 : 69지 청소

구 분			계	1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지
#1	1계열	1차	14지	5/3	3/27	4/8	5/7	6/28	5/15	7/2	5/17
		2차		7/10	9/26	7/29	9/4	11/13	8/21
	2계열	1차	14지	4/24	4/25	4/1	5/8	6/4	5/27	5/23	5/21
		2차			5/30	9/20	10/16				7/8
		3차			9/30						10/14
	3계열	1차	15지	3/28	5/24	8/22	4/27	8/13	5/10	7/3	7/18
		2차		10/11	6/17		7/26	11/12	8/3
		3차			8/6		11/14
	4계열	1차	14지	5/20	5/13	5/22	6/13	4/15	4/12	4/29	5/2
		2차			8/23	8/14		10/21	7/17	11/11	9/23
#2		1차	12지	3/25	4/18	4/22	4/30	4/16	3/29	5/9	7/25
		2차		10/7		6/26	7/13		7/12

※ 청소를 실시하였어도 슬러지수집기, 응집기 공사 등 시설물 정비 등을 위해 추가 청소 실시

○ 여과지 : 144지 청소(1정수장 128지, 2정수장 16지)

- 연 2회 청소 실시(1차 청소 4 ~ 6월, 2차 청소 11월)

※ 2정수장 여과지 하부집수장치 공사로 하반기 2정수장 여과지 청소 미실시

○ 정수지 : 6지 청소(1정수장 4지, 2정수장 2지)

- 생산량, 소독능 확보에 영향이 적은 가을철(10~11월)에 청소 실시

1정수장				2정수장
1,2계열		3,4계열
1지	2지	3지	4지	1지	2지
2019.11.08	2019.11.05	2019.10.31	2019.10.15	2019.10.01	2019.10.08

○ 활성탄흡착지 : 41지 청소

- 1계열 6, 7, 8지는 활성탄흡착지 역세척공정연구로 청소 미실시

○ 기타 시설물 청소

- 농축조 6지, #1 회수조 2지 청소, 침전지 퇴수변실 등 기타 시설물 청소

※ 오니처리장 증설 공사로 배슬러지지 청소 미실시

Ⅲ		설계변경 검토

⃞ 변경사유

○ 청소물량 증감에 따른 설계변경

- 시설물 정비 등을 위한 응집침전지 추가 청소로 시공물량 증가

- 2정수장 여과지 하부집수장치 공사로 하반기 2정수장 여과지 청소 제외

- 오니처리장 증설 공사 등 공정관리의 사유 등으로 일부 시설 청소물량 감소

- 회수조 준설모래 이동 시 오니처리장 공사장 덤퍼 이용, 모래량 실측으로 물량 증가

- 4계열, 2정수장 응집지 유입수문을 전동밸브로 교체하여 밸브개폐 감소

시설물 명칭	단위	물량내역		증감	사유
		당초	변경
침전지, 여과지 등 주벽청소	㎡	308,276	328,258	(증)19,982	- 슬러지수집기 정비 등을 위해 추가 청소
정수지	㎡	52,522	52,522	-
토사 걷기 및 싣기	㎡	97	110	-	- 센터 내 이동 시 준설모래양 측정
밸브 개폐	회	44	41	(감) 3	- 응집지 유입수문 전동밸브 설치(11월)
상등수 이송펌프 설치	회	72	81	(증) 9	- 응집침전지 청소물량 증가
상등수 이송펌프 운전	회	76	85	(증) 9	- 응집침전지 청소물량 증가
가설창고	개월	9	9	-

○ 보험료 정산에 따른 설계변경

- 사후정산 대상 보험(국민건강, 국민연금, 노인장기요양보험) 실납부액으로 변경

⃞ 변경내역

○ 용역금액 변경 : 감 3,068,100원([붙임]설계변경 내역서 참조)

- 당초 249,907,000원 ⇒ 변경 246,838,900원

구 분		금 액		증감	비고
		당 초	변 경
총용역비		249,907,000	246,838,900	(감) 3,068,100
도급액	공급가액	227,188,182	224,399,000	(감) 2,789,182	천원이하절사
	부 가 세	22,718,818	22,439,900	(감) 278,918	천원이하절사
	계	249,907,000	246,838,900	(감) 3,068,100

Ⅳ		행 정 사 항

⃞ 작업물량 증감 및 보험료 정산사항을 반영하여 변경계약 의뢰

붙임 : 설계변경 심의결과, 설계내역서, 합의각서, 보험증빙서류, 추진실적 각 1부. 끝.