문서번호	교통운영과-8607
결재일자	2019.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
김대원		박성재	12/16 강진동
협조

2019년 교통안전시설물(노면표시 등) 설치공사 건설사업관리(감리) 용역 설계변경(정산) 보고

2019. 12.

교통운영과

- 2019년 교통안전시설 설치공사 -

건설사업관리(감리) 용역 설계변경(정산) 보고

2019년 교통안전시설물(노면표시 등) 설치공사 건설사업 관리(감리) 용역과 관련하여, 과업일수 변경으로 인한 계약금액 조정에 따른 설계변경(정산) 검토 보고임.

용역 개요

용 역 명 : 2019년 교통안전시설(노면표시 등) 설치공사 건설사업               관리(감리) 용역

계약범위

권 역 별	사 업 소	자 치 구
동부권역(4개 지역)	동부도로사업소	강남구, 송파구, 강동구
서부권역(6개 지역)	서부도로사업소	중구, 용산구, 마포구, 서대문구, 은평구
남부권역(5개 지역)	남부도로사업소	동작구, 금천구, 관악구, 서초구
북부권역(6개 지역)	북부도로사업소	종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
성동권역(5개 지역)	성동도로사업소	중랑구, 동대문구, 성동구, 광진구
강서권역(5개 지역)	강서도로사업소	강서구, 양천구, 구로구, 영등포구

계약현황

구 분	계약업체	계약금액(원)	계약일자	착수일자	준공기한	비고
동부권역	㈜동해기술공사	121,380,000	‘19.2.26.	‘19.3.04.	‘19.12.20.
서부권역	㈜동해기술공사	121,380,000	‘19.2.26.	‘19.3.04.	‘19.12.20.
남부권역	한국검정㈜	121,704,260	‘19.2.26.	‘19.3.04.	‘19.12.20.
북부권역	㈜건영이앤씨	121,680,000	‘19.2.21.	‘19.3.04.	‘19.12.20.
성동권역	㈜태영알앤디	123,130,000	‘19.2.21.	‘19.3.04.	‘19.12.20.
강서권역	㈜트래픽스	122,672,000	‘19.2.21.	‘19.3.04.	‘19.12.20.

설계변경 내용

계약기간 : 변경없음

실 투입일수 정산

기관	공종	규격	투입일수		증감	비고
			당초	변경
동부권역	중급	주간	200	197	-3
		휴일	14	2	-12
		야간	1	-	-1
	초급	주간	199	197	-2
		휴일	14	8	-6
		야간	1	-	-1
서부권역	중급	주간	200	198	-2
		휴일	14	2	-12
		야간	1	-	-1
	초급	주간	199	198	-1
		휴일	14	3	-11
		야간	1	-	-1
남부권역	중급	주간	200	202	+2
		휴일	14	1	-13
		야간	1	0	-1
	초급	주간	199	202	+3
		휴일	14	1	-13
		야간	1	0	-1
북부권역	중급	주간	200	200	-
		휴일	14	-	-14
		야간	1	-	-1
	초급	주간	199	200	+1
		휴일	14	-	-14
		야간	1	-	-1
성동권역	중급	주간	200	202	+2
		휴일	14	-	-14
		야간	1	-	-1
	초급	주간	199	201	+2
		휴일	14	-	-14
		야간	1	-	-1
강서권역	중급	주간	200	202	+2
		휴일	14	7	-7
		야간	1	0	-1
	초급	주간	199	202	+3
		휴일	14	7	-7
		야간	1	0	-1

※ 변경된 투입일수는 실제 투입된 일수를 합한 날짜임.

설계변경 내역

지 역	당 초(원)	변 경(원)	증 감(원)	비 고
계	731,946,260	672,623,854	감)59,322,406
동부권역	121,380,000	111,534,000	감)9,846,000	㈜동해기술공사
서부권역	121,380,000	110,336,000	감)11,044,000	㈜동해기술공사
남부권역	121,704,260	111,657,854	감)10,046,406	한국검정㈜
북부권역	121,680,000	109,721,000	감)11,959,000	㈜건영이앤씨
성동권역	123,130,000	111,921,000	감)11,209,000	㈜태영알앤디
강서권역	122,672,000	117,454,000	감)5,218,000	㈜트래픽스

조치 계획

상기 내용과 같이 설계변경 시행

- 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 노면표시도색 및 제거, 감리비(202-401-02)

향후 계획

재무과로 설계변경 계약의뢰

변경계약 후 준공

붙  임 : 각 권역별 설계변경내역서 및 관련서류 1부.  끝.