문서번호	시설보수과-10865
결재일자	2019.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	12/16 박문희
협조

- 가리봉철도고가 보수공사

설계변경(정산) 보고

2019. 12.

가리봉철도고가 보수공사

설계변경(정산) 보고

「가리봉철도고가 보수공사」와 관련, 기 보고한 공사물량 증·감 및 각종보험료 미사용 등에 따른 최종 정산 처리된 설계변경내역이 감독기관인 시설공단으로부터 제출되어 검토보고 후 조치코자 함.

※ 시설공단 공사감독1처-8752(2019.12.13.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 가리봉철도고가 보수공사

○ 공사기간 : 2019. 5. 3 ~ 2019. 12. 23

○ 공사규모

- 강재도장공 A=2,327㎡, 신축이음설치 100m, 콘크리트단면보수 282.5㎡ 등

○ 도 급 비 : 961,800,700원

○ 도 급 자 : ㈜양지엔지니어링 대표 박순만

○ 감 독 자 : 서울시설공단 공사감독1처

○ 예산현황 : 총공사비 1,091,891천원

(도급비 961,801천원. 관급자재비 50,068천원. 이전비 80,022천원)

	< 예산현황 >
▷예산배정: 1,250,000천원(도급비 1,114,490, 관급비 50,069, 이전비 80,024) ▷계약금액: 1,091,891천원(도급비 961,801, 관급비 50,068, 이전비 80,022) ▷변경금액: 1,045,799천원(도급비 993,234, 관급비 50,068, 이전비 2,497)

Ⅱ		설계변경(정산) 검토보고

❏ 서울시설공단

○ 보고내용

○ 관련근거

- 공단 공사감독1처-3056(2019.6.12.) : 착수전 설계도서 검토보고

- 시설보수과-5243(2019.6.17) : 누락된 도장구간 추가 작업지시

- 공단 공사감독1처-4824(2019.8.13.) : 절연방호관 설치(철도협의사항)

- 시설보수과-7287(2019.8.22.) : 절연방호관 및 열차감시원 등 협의결과 반영

- 공단 공사감독1처-5607(2019.9.9.) : 공중비계 설치방법 변경(철도협의)

- 시설보수과-8053(2019.9.17.) : 공중비계 등 철도협의사항 반영

- 시설보수과-10337(2019.11.28.) : 재경비 실정산 반영 지시

○ 도급비 변경내용 : (증) 31,433,300원

- 강재도장 추가반영 : (증)24,045천원

- 공중비계 설치 및 해체 등 철도협의사항 반영 : (감)1,192천원

- 절연방호관 설치 및 철도안전관리자 반영(야간) : (증)62,423천원

- 제경비(보험료) 미사용에 따른 실정산 반영 : (감)53,842,674원

· 건강보험료         : 당초 15,446,970원 → 정산 989,900원

· 노인장기요양보험료 : 당초  1,314,537원 → 정산 84,220원

· 연금보험료         : 당초 21,520,546원 → 정산 0원

· 퇴직공제부금       : 당초  9,382,374원 → 정산 4,900,000원

· 안전관리비         : 당초 17,671,602원 → 정산 13,070,000원

· 환경보전비         : 당초  4,889,036원 → 정산 0원

· 건설기계대여대금   : 당초  2,661,809원 → 정산 0원

○ 관급자재(교량이음장치) : 100m, 50,068천원(정산)

○ 폐기물(콘크리트) 처리 : 87.929톤, 2,506천원

- 2019년 건설폐기물 수집운반 및 처리용역(연간단가)에 포함 배출한 상기 물량에 대하여 본공사 이전비를 활용 별도 정산

○ 공사비 변경 내역

구 분	당 초	변 경	증, 감	비고
총 공사비	1,091,890,700	1,045,799,000	(감) 46,091,700	(단위:원)
도 급 비	961,800,700	993,234,000	(증) 31,433,300
관 급 비	50,068,000	50,068,000	-
이 전 비	80,022,000	2,497,000	(감) 77,525,000

※ 예산과목 : (2019예산) 교량안전과, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로관리, 가리봉철도고가 보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

○ 공사진행중에 현장실정 보고된 사항에 대하여 기 승인 처리한 내용이 반영되었고, 계약자가 납입확인서를 미제출한 보험료 등에 대하여 실정산 반영

○ 폐기물처리비는 별도입찰에 의한 계약금액으로 반영하였으며, 실정산물량 반영

○ 관급자재는 실정산물량(100m)과 변경없음

○ 상기와 같은 변경물량 등에 의거 설계변경되었음을 확인하였기 설계변경 승인코자 함

붙임 : 1. 설계변경(정산) 설계도서 1부.

2. 현장실정보고서 및 검증확인서 1부.  끝.