투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(중랑천 건설폐기물처리용역 계약기간변경)

우리부에서 시행중인 『중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사 건설폐기물 처리용역용역

나. 용 역 비 : 총차 1,063,480,000원(1차 100,000,000원)

다. 용역기간 : 총차 2019.06.07.∼2022.06.30. (1차 2019.06.07~2019.12.31)

라. 도 급 자 : 현대환경㈜ 대표 고 광 만

마. 변경내용(1차 계약기간 변경)

구 분		당 초	변 경	비고
계약금액	총차	1,063,480,000	1,063,480,000	변경없음
	1차	100,000,000	100,000,000	변경없음
계약기간	총차	‘19.06.07~’22.06.30	‘19.06.07~’22.06.30	변경없음
	1차	‘19.06.07~’19.12.31	‘19.06.07~’20.06.20	증 171일

바. 변경사유 : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사 기간연장으로 인한 폐기물처리용역 계약기간 연장

사. 예산과목 : 물순환안전국 하천관리과, 치수및하천관리, 하천복원및정비, 중랑천마스터플랜단기사업, 시설비및부대비, 시설비

붙임   관련문서 1부.    끝.

	방재시설부장
주무관	이현호		치수시설과장	조성만		방재시설부장	12/16 이임섭
협조자
시행	방재시설부-18815	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02 3708 8774	/전송		/	lhh1030@seoul.go.kr	/	대시민공개